문서번호	급수운영과-9949
결재일자	2024. 6. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장
최형진	전결 06/03
	채재일
협 조
	급수관리팀장		신정우

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

(2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사)

2024. 6.

서부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

(2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사)

급수운영과장 :채재일☎3146-3640 급수관리팀장 : 신정우☎3649 담당 : 최형진☎3642

우리 사업소 시행중인「2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사」의 신규 공종 등에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사

ㅇ 공사기간 : 2023.05.10. ~ 2024.06.22.

ㅇ 공사개요 : D500~600㎜, L=1,180m

ㅇ 계약금액 : **************

ㅇ 도 급 자 : ***************

ㅇ 감 독 자 : **************

□ 설계변경 현황

ㅇ 설계변경 사유

- 공사시행에 따른 신규 공종 및 물량 증·감 발생

▸ 신규 공종 : 부단수차단(주철관) 700mm, 야간 등 2개 공종

▸ 물량 증감 : 원형밸브실 설치공 등 15개 공종

ㅇ 공사비 증·감 현황

(단위: 원)

***		***	***	***
***	****	*************	*************	*
	***	***********	***********	*
	*	*************	*************	*

□ 심의 결과

ㅇ 공종별 산출 적정성 여부: 적정

ㅇ 신규공종 산출 적정성 여부: 적정

ㅇ 수량산출 적정성 여부: 적정

ㅇ 고용개선지원비 정산 적정성 여부: 적정

ㅇ 설계변경에 따른 제비율 적정 여부: 적정

□ 향후 계획

ㅇ 상기와 같이 설계변경 심의 결과 신규공종 단가산정, 공종 및 수량산출 등이 적정한 것으로 판단되어 설계변경 및 변경계약을 체결하고자 함.

붙임  1. 설계변경 심의 의결서 1부.

2. 설계변경 검토 보고 1부.

3. 설계변경 사유서 1부.  끝.