문서번호	행정지원과-11540
결재일자	2024. 6. 3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		남부수도사업소장
이상욱	정선이	홍기관		06/03
				김정선
협 조

2024년 청사 본관 승강기 설치공사 계획(수정)

2024. 5.

남부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 청사 본관 승강기 설치공사 계획

행정지원과장 : 홍기관☎3146-4410  행정관리팀장 : 정선이☎4456  담당 : 이상욱☎4416

우리 사업소를 내방하는 장애인·노약자 등의 민원인과 직원의 편의증진및 비품 이동 시 안전사고 예방을 위해 엘리베이터를 설치하고자 함.

□ 추진배경

ㅇ 장애인·노약자 등 층간 이동을 위한 엘리베이터 설치로 불편 해소

- 내방 민원인 외 대다수를 차지하는 노령 민원인 층간 이동 편의 제공

- 향후 증가가 예상되는 장애 공무원 이동 편의 제공

ㅇ 계단을 이용한 중량물 운반 시 안전사고 예방

※ 환경수자원위원회 본부 업무보고 시 지적(요구)사항 ('22.2월, 송명화 의원)

□ 추진경과

ㅇ 기술용역 타당성 심사 요청	: ’23. 2 .8.
ㅇ 승강기 설치 지점 사전 지반조사 시행	: ’23. 3 .2.
ㅇ 설계용역 시행(건축, 전기 · 소방 · 통신) 및 완료	: ’23. 3. 20. ~ 5. 28.
ㅇ 특정제품(승강기) 선정 심사위원회 개최	: ’24. 1. 22. ~ 1 .26.
ㅇ 공사계약 심사(본부 안전조사과)	: ’24. 3. 8. ~ 4. 30.

□ 현    황

ㅇ 청사현황

구 분	구 조	준공연도	연 면 적	층 수
******	******	**********	*********	**********

ㅇ 직원현황 : 총 ***명(’24. 5. 17. 기준)

구 분 (층 수)		행정지원과 (1-2층)	요금과 (1층)	현장민원과 (3층)	급수운영과 (3층)	시설관리과 (2층)
현 원	***	**	**	**	**	**
장애공무원	*	*	*	*	*	*

※ 장애공무원 : ***********

□ 개    요

ㅇ 사 업 명 : 2024년 청사 본관 승강기 설치공사

ㅇ 위    치 : 동작구 여의대방로10길 97 남부수도사업소

ㅇ 규    모 : 15인용 장애인용 승강기 1대(1~3층 구간) 및 부대공사 1식

ㅇ 공사기간 : 2024. 6. ~ 9. (착공일로부터 90일 예정)

ㅇ 사업예산

(단위 : 천원)

구 분(예산과목)		금 액	비 고
총 합계		*******
합 계(설계용역 제외)		*******
**** *******	*******	******
	***********	*****
	******	******
	*******	*******
****** *****	**** *******************	******
	******	******
	******	*****
	******	******
	******	*******
**** *****	*******	*****
	******	*****
	******	*****
	******	*****
	******	******
*******************		*****

□ 세부 추진계획

ㅇ 승강기 설치(관급자재)

- 업 체 명 : ********

- 모 델 명 : ********

- 금    액 : *****************************

- 용    도 : 승객 / 장애인겸용

- 용    량 : 15인용(1,150kg) / 승강속도 60m/min

- 크    기 : 폭(1,550mm) x 깊이(1,600mm) x 높이(2,300mm)

출입문 높이 2m 이상 확보

- 운 행 층 : 지상 1층 ~ 3층(지하 및 옥상 제외)

ㅇ 설치위치

설치위치

ㅇ 층별 증축면적

구 분		B1층	1층	2층	3층	4층 (PH층)	합 계
면 적	기 존	694.24㎡	745.1㎡	761.77㎡	751.66㎡	65.4㎡	3,018.17㎡
	증 축	-	12.38㎡	5.81㎡	5.81㎡	5.95㎡	29.95㎡
합 계		694.24㎡	757.48㎡	767.58㎡	757.47㎡	71.35㎡	3,048.12㎡

ㅇ 공사내용

- 건축·기계 : 구조물 설치 및 장애인용 편의시설 등 기계설비공사

- 전    기 : 승강기용 주전원 신설 및 전등설비 시공

※ 전기설비 증설 및 변동사항 없음

- 소    방 : 자동화재탐지(화재감지기) 및 유도등 설치

- 통    신 : CCTV 신설 및 비상벨 설비 공사

① 관급자재 구매

ㅇ 구매대상

***********************************************************************************************************************

******************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************

ㅇ 구매금액 : ******************************

- *******************************

ㅇ 예산과목

- 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비 확충

및 청사 환경개선, 시설비및부대비, 시설비(기계장치)

② 공사 발주 및 시행

ㅇ 건축 · 기계공사 : 제한경쟁 입찰(지역제한) - 공고

- 「건설산업기본법」에 의한 건축공사업(또는 토목건축공사업)을 등록한 업체로서, 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

ㅇ 전기 · 소방 · 통신공사(분리발주)

- 공사업체

▶ 전    기 : *********************************

▶ 소    방 : ******************************************

▶ 통    신 : **************************************

- 계약방법 : 1인견적 수의계약

· 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호

- 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비

확충 및 청사 환경개선, 시설비및부대비, 시설비(기계장치)

③ 용역 발주 및 시행

ㅇ 시공별 감리 및 감독 용역

- 감리업체

▶ 건    축 : **********************

**************************

「건축법」제25조(건축물의 공사감리)

① 건축주는 대통령령으로 정하는 용도 · 규모의 및 구조의 건축물을 건축하는 경우

건축사나 대통령령으로 정하는 자를 감리자로 지정하여 공사감리를 하게 하여야 한다.

「건축법 시행령」제19조(공사감리)

① 법 제25조 제1항에 따라 공사감리자를 지정하여 공사감리를 하게 하는 경우에는

다음 각 호의 구분에 따른 자를 공사감리자로 지정하여야 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 : 건축사

가. 법 제11조에 따라 건축허가를 받아야 하는 건축물을 건축하는 경우

※ 동작구청 건축과 (’23. 06. 27.) 허가

▶ 전    기 :************************************

※ 「전력기술관리법」제12조(공사감리 등) 의거, 법적 감리대상 의무사항은 아니지만, 전문적인 공종 및 원활한 감독을 요하므로 감리 배치

▶ 소    방 : ***************************************

「소방시설공사업법」제17조(공사감리자의 지정 등)

① 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 대하여 자동화재탐지설비, 옥내소화전설비 등

대통령령으로 정하는 소방시설을 시공할 때에는 소방시설공사의 감리를 위하여

감리업자를 공사감리자로 지정하여야 한다.

② 제1항에 따라 공사감리자를 지정하였을 때에는 소방본부장이나 소방서장에게 신고하여야 한다.

▶ 통    신 : *************************************

「정보통신공사업법 시행령」제8조(감리대상인 공사의 범위)

① 법 제8조제1항에 따라 용역업자에게 감리를 발주해야 하는 공사는 제6조제1항 각 호의        공사 및 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 제외한 공사로 한다.

「정보통신공사업법 시행령」제6조(설계대상인 공사의 범위)

① 법 제7조에 따라 용역업자에게 설계를 발주해야 하는 공사는 다음 각 호의 어느 하나에       해당하는 공사를 제외한 공사로 한다.

4. 기존설비를 교체하는 공사로서 설계도면의 새로운 작성이 불필요한 공사

※ 위의 법령에 의거, 전문적인 공종 및 감독을 요한다고 판단

- 계약방법 : 1인견적 수의계약

· 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호

- 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비

확충 및 청사 환경개선, 시설비및부대비, 감리비(기계장치)

ㅇ ‘재해예방 기술지도’ 용역 발주

「산업안전보건법」제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도)

① 대통령령으로 정하는 건설공사의 건설공사발주자 또는 건설공사도급인은 해당 건설공사를

착공하려는 경우 제74조에 따라 지정받은 전문기관(건설재해예방전문지도기관)과 건설

산업재해 예방을 위한 지도계약을 체결하여야 한다.

「산업안전보건법」제59조(기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결 시기)

① 법 제73조제1항에서 “대통령령으로 정하는 건설공사”란 공사금액 1억원 이상 120억원

(토목공사업에 속하는 공사는 150억)미만인 공사와 「건축법」제11조에 따른 건축허가의

대상이 되는 공사를 말한다.

※ 공사기간 1개월 미만인 공사는 제외(해당 없음, 공사기간 3개월 예정)

② 건설 산업재해 예방을 위한 지도계약을 해당 건설공사 착공일의 전날까지 체결해야 한다.

- 재해예방기술지도 업무

· 관리적 사항

▶ 현장 안전조직 확인, 산업안전보건관리비 사용계획 등 지도

▶ 근로자 교육 및 보호구 착용

▶ 산업안전보건법령 등에 관한 사항 지도 및 점검

· 기술적 사항

▶ 추락, 낙하 등 재해예방에 관한 사항

▶ 위험기계기구의 방호조치

▶ 건설기계 및 장비 확인

▶ 기타 안전관리 점검 사항 확인

- 업무 수행 절차

계약 체결	⇨	현장 안전점검	⇨	보고서 작성	⇨	준공 및 종료
< 계약 대상 > 건설공사 1억원 이상 ~ 120억 미만 (토목공사 150억 미만)		15일마다 1회 (월 2회)		작성된 보고서 전산입력		공사 및 재해예방기술지도 종료 및 완료증명서 제출

- 업 체 명 : **************

· 주    소 : 서울특별시 서초구 서초대로64길 47(서초동)

- 계약방법 : 1인견적 수의계약

· 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호

- 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고,

청사 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(일반관리비)

□ 향후일정

ㅇ 공사 발주(건축 · 전기 · 소방 · 통신)	: ~ ’24. 5.
ㅇ 감리용역 발주(건축 · 전기 · 소방 · 통신)	: ~ ’24. 5.
ㅇ 엘리베이터 설치공사 시행(착공)	: ~ ’24. 6.
ㅇ 공사 준공	: ~ ’24. 9.
ㅇ 승강기 사용검사	: ~ ’24. 9. ~ 10.

□ 기대효과

ㅇ 장애인, 노약자 방문 시 계단이용에 따른 불편 해소

- 휠체어 이용 민원인 방문 시 층간 이동 편의제공

- 60~80대 방문 민원인이 많아 계단 이용 시 미끄럼 등 안전사고 예방

※ 방문민원 처리부서 : 시설관리과(2층), 급수운영과(3층), 현장민원과(3층)

ㅇ 공공청사에 대한 시민 이용 편의성·접근성 향상

ㅇ 비품 이동시 계단 이용으로 인한 안전사고 우려 해소.

붙임  1. 설계심사 결과(건축 및 기계) 1부

2. 산출내역서(전기, 소방, 통신공사) 1부

3. 산출내역서(감리용역) 1부

4. 조달구매내역서(관급자재) 1부.  끝.