아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사)

우리 사업소에서 시행중인『2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사』와 관련하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

1. 공  사  명 : 2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사

2. 계약상대자 : ***************

3. 계약  기간 : 2023. 05. 10. ~ 2024. 06. 22.

4. 설계변경 금액 내역

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증·감
도급비	공급가액	1,164,885,455	1,164,885,455	-
	부가세	116,488,545	116,488,545	-
	계	*************	*************	-

※ 신규공종 및 물량증감 발생으로 인한 계약 변경

5. 설계변경 사유: 신규공종 발생 및 계약물량 증․감

붙임  1. 설계변경 심의위원회 개최 결과 보고 1부.

2. 설계변경 심의위원회 의결서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의서 및 기타서류 1부.  끝.

주무관	최형진		주무관	구준모		급수운영과장	채재일		서부수도사업소장	06/04
김정윤
협조자	급수관리팀장	신정우
시행	급수운영과-9998	(	2024. 6. 4.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, (홍제동) 38-69 3층	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3642	/전송	02-3146-3689	/	peach7410@seoul.go.kr	/	부분공개(5)