문서번호	정보자원운영과-4816
결재일자	2024. 6. 4.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정보자원운영과장	데이터센터소장
송은주		김성국	06/04
			임승철
협 조
	인터넷통신과장			황기원
	주무관			윤장미
	주무관			代석현지
	주무관			고동수

시스템실 환경개선 추진계획

2024. 6.

데이터센터

(정보자원운영과)

시스템실 환경정비 추진 계획

데이터센터 3층 시스템실 콘솔룸 노후 벽체 패널 교체를 통해 시스템 관련 작업의 안정성을 향상시키고 콘솔실 작업 환경을 개선하여 시스템 운영에 만전을 기하고자 함

I		추진개요

□ 추진근거 : ***************************

**************

□ 수 행 사 : **************

□ 작업기간 : ***************************

□ 주요작업

○ 기존 노후 벽체 철거

○ 벽체 하부 노후 엑세스플러어 교체*******

○ 신규 벽체 설치

○ ********************************

○ 벽체 연결된 냉복도 컨테인먼트 해체 및 재조립

□ 참여인력 : 총***명

○ 데이터센터 :***

- ****************

○ 삼양데이타시스템(컨소시엄) : **

- 작업감독 : *******

○ 수행 업체 : *****

- *******************************

Ⅱ		세부작업 계획

□ 노후 벽체 교체

○ 교체범위 : 콘솔실 노후 벽체 및 출입문 3식

**************************************************************************************************

○ 노후 벽체 철거 및 신규 벽체 설치

- 기존 벽체 색상과 동일 또는 유사 색상의 벽체로 교체

- *******************************

※ ****************************

**********************************

□ 액세스플로어 교체

- 노후벽체 하부 노후 엑세스플로어 교체(약 20매)

□ 냉복도 컨테인먼트 철거 및 재설치

- 시스템실 벽체 연결된 냉복도 컨테인먼트*******

※ ***************************

□ 상세 작업 일정

구분	작업 시간	세부 작업 내용	비고
6월 17일 (월)	09:00 ~ 17:00	시스템실 벽체에 연결된 냉복도 컨테인먼트 철거********** 철거된 냉복도 컨테인먼트 자재창고 보관
6월 18일 (화)	09:00 ~ 17:00	벽체 철거구간의 먼지 확산 방지를 위한 보양 작업 벽체 하부 노후 엑세스플로어 교체용 반입 ************************************************** 노후 엑세스플로어 교체 노후 벽체 폐기물 등 반출
6월 19일(수) ~ 6월 20일 (목)	09:00 ~ 17:00	신규 벽체 및 출입문(3식) 설치 ************************************
6월 21일 (금)	09:00 ~ 16:00	냉복도 컨테인먼트********* 재설치 설치 상태 및 미비점 점검 작업 종료

Ⅲ		조치사항

□ 사전조치

○ 작업인원 전원 보안서약서 징구

○ 작업인원 대상 보안 및 안전교육 실시

○***********************************

○ ************************************

Ⅳ		향후 계획

○ *****************************

***************************끝.