문서번호	수변감성도시과-7377
결재일자	2024. 6. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수변정책팀장	수변감성도시과장
문대식		홍현탁	06/04
			박홍봉
협조

「묵동천 수변감성활력거점 조성」기본 및 실시설계 용역

준공기한 연기 검토보고

2024. 6.

물순환안전국

(수변감성도시과)

「묵동천 수변활력거점」조성 기본 및 실시설계 용역

준공기한 연기 검토보고

「묵동천 수변활력거점 조성」기본 및 실시설계 용역 준공기한 연기 사유가 발생하여 설계변경을 시행하고자 함

Ⅰ		용역개요

ㅇ 용 역 명 : 묵동천 수변활력거점 조성 기본 및 실시설계 용역

ㅇ 용역기간 : ’23. 11. 8. ~ ’24. 6. 7.

*****************************

*********************************

ㅇ 과업내용

- (장미공원 내) 장미공원카페 및 수변테라스 조성

- (구묵동교 일대) 수변휴식공간 조성 및 환경 개선

- (운영매뉴얼 마련) 이용자 특성을 고려한 콘텐츠 도입방안 등

Ⅱ		추진경과

ㅇ ’23. 4. : 자치구 공모(2차) - 대상지 선정

ㅇ ’23. 8. ~ `23. 10. : 설계공모 및 당선작 선정

ㅇ ’23. 11. : 설계용역 계약 및 착수

ㅇ ’24. 1. : 중랑구 치수과 설계공모안 협의

ㅇ ’24. 1. : 착수보고회 개최

ㅇ `24. 4. : 기본설계 완료 및 중랑구청 유관부서 협의

Ⅲ		설계변경 내용

ㅇ 변경사항 : 계약기간 연장

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	******************	*******************

ㅇ 지체상금 부과여부 : 해당없음

********

****************************************

Ⅳ		향후 계획

***********************

***************************

************************

Ⅴ		행정 사항

ㅇ 준공기한 연기에 따른 계약변경 의뢰 공문 발송(→ 재무과)

붙임  준공기한 연기 합의각서 1부.  끝.