문서번호	급수운영과-8703
결재일자	2024. 6. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
유성원	김종섭	06/05
		代김종섭

급수공사 작업기간 연기 보고

(개량-105, 개량-107)

2024.  6.

강동수도사업소

(급수운영과)

급수공사 작업기간 연기 보고(개량-105, 개량-107)

「2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사(연간단가)」업무 수행 중 급수공사 작업기간 연기 신청서가 접수되어 다음과 같이 보고함.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사

○ 공사기간: 2023. 6. 15. ~ 2024. 6. 30.

○ 계약금액: ************

○ 계약업체: **************

□ 접수내역

○ 급수공사 현황

연번	지시번호	주 소	수요가	당초	변경	비고
1	개량-105	*********	****	************ **************	************ **************
2	개량-107	**********	*****	************ **************	************ **************

○ 연기사유

연번	지시번호	연기 사유
1	개량-105	작업시 수요가 입회 요청으로 인한 일정 협의로 인한 연기 요청
2	개량-107	문화재 연구소 일정으로 인한 입회 불가로 연기 요청

□ 지연배상금 부과 여부

○ *************************

□ 조치사항

○ *********************

붙임  1. 공사 연기 요청서(개량-105) 1부.

2. 공사 연기 요청서(개량-107) 1부.  끝.