문서번호	총무과-8825
결재일자	2024. 6. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	청사팀장	총무과장	경영관리부장
김상훈	곽대근	박은섭	06/07
			안병희
협 조
	재무회계과장		代김미정
	기획예산과장		代이관성

[별관3층 외 2개소 환기설비 교체공사]

설계변경 심의 후 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 6.

경 영 관 리 부

[총 무 과]

[별관3층 외 2개소 환기설비 교체공사]

설계변경 심의 후 결과보고

경영관리부장: 안병희 ☎3146-1601 총무과장:  박은섭 ☎1110 담당: 김상훈 ☎1136

「별관3층 외 2개소 환기설비 교체공사」 시행 중 물량감소 및 제경비 미정산에 따른 공사금액 정산사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 함

□ 사업현황

ㅇ 사 업 명 : 별관3층 외 2개소 환기설비 교체공사

ㅇ 사업기간 : 2024. 4. 26. ~ 2024. 6. 29.

ㅇ 계약금액 : 금63,377,800원[금육천삼백삼십칠만칠천팔백원]

ㅇ 계 약 자 : **********

ㅇ 사업내역 : 별관3층, 6층 체력단련실 및 지하1층 환기설비 교체 1식

□ 설계변경 심의 개최 현황

ㅇ 일    시 : 2024. 5. 31.

ㅇ 장    소 : 총무과 회의실

ㅇ 심의위원

- 위원장 : 총무과장

- 위  원 : **************************************

ㅇ 계 약 자 : 주식회사 비에스파워

ㅇ 사업내역 : 별관3층, 6층 체력단련실 및 지하

□ 설계변경 사유 및 사항 세부내용

ㅇ 사 유 : 물량감소에 및 제경비(보험료 등) 정산에 따른 감액

ㅇ 계약금액 변경사항 : 감액

ㅇ 변경내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	**********	**********	*************
부가가치세	*********	*********	************
도급금액	**********	**********	*************
결정금액	**********	**********	*************

ㅇ 세부 공사비 증감

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
순공사원가	재료비	*********	*********
	노무비	**********	**********	*
	경 비	*********	*********	***********
	소 계	**********	**********	***********
일반관리비		*********	*********	*********
이 윤		*********	*********	*********
고재처리		********	********
기자재비		**********	**********	********
총원가		**********	**********	***********
부가세		*********	*********	*********
도급비		**********	**********	***********

ㅇ 주요 변경 내역

연번	변경사항	당초	변경	증․감
○ 기자재 물량 감소로 인한 감액
25	룸콘트롤러 1개 감소	**********	**********	********
○ 제경비 감액
27	건강, 연금, 노인장기 요양보험료, 퇴직공제부금 등 미정산으로 인한 감액	*********	*******	***********
30	경비금액 변경으로 인한 일반관리비 및 이윤 변경	*********	*********	*********
32	공급가액 변경으로 인한 부가가치세 변경	*********	*********	*********

□ 심의결과

ㅇ 물량 증·감 공종 적정성 여부 : 적정

ㅇ 단가적용 적정성 여부 : 적정

ㅇ 제비율 산정 및 요율의 적정성 여부 : 적정

□ 조치의견 : 상기 심의결과를 반영하여 설계변경 시행하고자 함

따로붙임   1. 설계변경 내역서(안) 1부.

2. 계약금액 조정 검증확인서 1부.

3. 산업안전관리비 검토결과서 1부.

4. 심의의결서 1부.

5. 합의각서 1부.   끝.