문서번호	시설과-5810
결재일자	2024. 6. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
정영권		김성현	06/07
			문석기
협조

동양관 전기설비 공사 관련 정전작업 계획

2024. 6.

서 울 대 공 원

(시 설 과)

동양관 전기설비 공사 관련 정전작업 계획

1

서울대공원 동양관 내 배전설비 교체 등 전기시설물 유지보수 공사를 위한 정전작업 계획을 보고드림.

1		추진 근거

● 서울대공원 동양관 수배전반 개선공사 추진계획

[시설과-4466(2024.04.29.)]

2		작업개요

● 정전사유 및 공사개요

연번	위치	공사내용	정전 대상	비고
1	동양관	노후 배전설비 교체/ 비상전원 이전 설치	O	저압반 3면, 고압반 3면
2	해양관	비상전원 이전 설치	O

- 동일범위 내 정전작업 동시 실시로 정전 최소화 실시

● 정전 계획

구분	정전일시	정전구역	관계시설
부분정전	2024. 6. 19.(수) 18:00~익일 09:00	동양관, 해양관	동양관, 해양관, 남미관 등 ※ 입점업체 정전 예정일 통보 완료
부분정전	2024. 6. 21.(금) 18:00~22:00	동양관	동양관, 해양관, 남미관 등 ※ 입점업체 정전 예정일 통보 완료

● 근무인원

근무시간	근무자	근무내용
2024. 6. 19. (수) 18:00 ~ 익일 09:00	******** ******************	· 공사감독 · 현장 전기안전관리 등 · 휴게시간 3시간
2024. 6. 21. (금) 18:00 ~ 22:00	******** ********	· 공사감독 · 현장 전기안전관리 등 · 휴게시간 1시간

3		향후 계획

● 2024. 6. : 정전안내(방송) 실시 및 공사 감독 실시.  끝.