문서번호	치수과-4292
결재일자	2024. 6. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		김창신	06/10
			이유국
협 조

- 2023년 한강 취수장 주변 준설공사 -

실정보고에 대한 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024.  6.

미래한강본부

(시설부)

- 2023년 한강 취수장 주변 준설공사 -

실정보고에 대한 검토 보고

「2023년 한강 취수장 주변 준설공사」관련 건설사업관리자 실정보고 사항(사토장 변경)에 대하여 검토하여 처리계획을 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 한강 취수장 주변 준설공사

ㅇ 위    치 : 한강 잠실수중보 상류(취수장 주변)

ㅇ 공사기간 : '23. 8. 21. ~ '24. 6. 30.

ㅇ 공사규모 : 준설 및 반출 38,990㎥

- 자양 1,300㎥, 일산 500㎥, 풍납 22,660㎥, 성남 14,200㎥, 강북 330㎥

********************

ㅇ 시 공 사 : 유호산업개발(주) 대표 유정환

ㅇ 감 리 사 : ㈜이준엔지니어링 외 1개사 대표 김정대

□ 추진경위

ㅇ '23.  8. 21. : 공사착수

ㅇ '23. 12. 19. : 준설토 반출 28,990㎥

ㅇ '24.  2. 26. : 준설토 반출 291㎥(서래섬 현장)

ㅇ '24.  4. 29. : 준설토 반출 2,782㎥(당인리 한강 연결로 조성)

ㅇ '24.  6.  3. : 대체 사토장 부지 현장조사

ㅇ '24.  6.  4. : 실정보고서 제출(시공사→건설사업관리단)

ㅇ '23.  6. 10. : 실정보고 검토의견서 제출(건설사업관리단→치수과)

□ 보고내용

ㅇ 준설토 재사용 공사장 공기지연 등에 따른 사토장 변경 필요

- '24년 잔여 준설토를 본부 건설공사 현장으로 공급을 계획하였으나, 지장물 저촉에 따른 공사 지연으로 준설토 반출이 곤란한 실정임

‣ 준설토 반입 공사장 : 암사초록길 조성, 당인리 한강 연결로 현장

- 토석정보시스템 조회 결과, 시기 불일치 및 준설토 사용 부적합 등으로 민간사토장으로 변경 필요

구 분	시기 불일치	토질 부적합	비 고
순성토 현장(12개소)	7개소	5개소

⇒ 홍수기 전 반출 완료해야 하는 현장 특성을 감안하여 준설토 적기 반입이 가능한 민간 사토장으로 변경 조치

‣ 다만, 민간 사토장으로 운반거리가 증가(약 27km)함에도 불구하고 계약상대자와 협의, 계약된 운반거리(50.08km) 단가 적용

구 분	운반거리(km)	수량(㎥)		증·감		비 고
		당초	변경
광주시 방도리 212, 218	50.08	17,234	17,234		-	민간사토장
안양천교 자전거도로 신설현장	27.08	11,756	11,756		-	시설관리과
암사초록길 조성 현장	5.19	10,000	-	감)	10,000	기반시설과
당인리 한강 연결로 현장	22.41	-	2,782	증)	2,782	시설관리과
서래섬 현장	16.12	-	291	증)	291	시설관리과
강원도 춘천시 근화동 786-55	87.70	-	3,927	증)	3,927	민간사토장
양평군 덕평리 393	43.55	-	3,000	증)	3,000	민간사토장

ㅇ 공사비 증·감 현황                                         (단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증․ 감		비 고
*******	*************	*************	**	***********
*********	***********	***********	**	**********
*********	*************	*************	**	***********

□ 조치계획

ㅇ 홍수기 전 준설토 반출 완료를 위해 건설사업관리단 검토의견을 반영하여 우선 작업지시

- 반출량 : 6,927㎥

- 사토장 : 강원도 춘천시 근화동, 경기도 양평군 덕평리 393

ㅇ 사토장 변경에 따른 소요예산은 '24년 예산(시비) 사용

- 신규비목은 상호 협의한 협의율(94.27%) 적용하여 설계변경 시 반영

□ 행정사항

ㅇ 작업지시 통보(치수과→건설사업관리단)

ㅇ 물량 증‧감 사항을 반영하여 추후 설계변경 시행

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.