문서번호	토목부-11316
결재일자	2024. 6. 7.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
송진수		代김경수	06/07
			代박운용
협조

- 창동 상계 동서간 연결교량(보차도교, 보행교) 건설공사 -

실정보고(물가변동 계약금액조정-5회)검토 보고

2024. 06.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량(보차도교, 보행교) 건설공사 -

실정보고(물가변동 계약금액조정-5회)검토 보고

『창동 상계 동서간 연결교량(보차도교, 보행교) 건설공사』물가변동 계약금액조정(제5회) 실정 보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

□ 근거

ㅇ 물가변동으로 인한 계약금액조정(5회) 검토보고 - 창동상계 제24-122호('24.06.05.)

□ 공사개요

ㅇ 보차도교

- 사 업 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사

- 규    모 : 보차도교 신설(B=32.0m, L=118.0m)

- 도 급 비 : ************************

- 사업기간 : '21.04.19. ∼ '25.05.31.

- 시공사/건설사업단 : *****************************

ㅇ 보 행 교

- 사 업 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

- 규    모 : 보행교 신설(연장 110.5m, 폭 10.0~15.0m)

- 도 급 비 : ********************

- 사업기간 : '21.04.19. ∼ '25.04.18.

- 시공사/건설사업단 : *****************************

□ 물가변동 조정현황

ㅇ 보차도교

(단위 : 원)

구 분	1회	2회	3회	4회	5회(금회)	조정요건
직전조정일 (기준시점)	***********	***********	***********	***********	***********	****
조정기준일 (비교시점)	***********	***********	***********	***********	***********	***** ******
물가변동율	*****	*****	*****	*****	*****	*******
조정금액	***********	***********	***********	***********	***********

ㅇ 보 행 교

(단위 : 원)

구 분	1회	2회	3회	4회	5회(금회)	조정요건
직전조정일 (기준시점)	***********	***********	***********	***********	***********	****
조정기준일 (비교시점)	***********	***********	***********	***********	***********	***** ******
물가변동율	*****	*****	*****	*****	*****	*******
조정금액	***********	***********	***********	***********	**********

□ 물가변동 조정(5회) 세부내역

ㅇ 물가변동 조정 요건

구 분	검 토 항 목		검 토 내 용	결과	비 고
조정방법	***********		********	**
적용요건	***** ******	******************	******* ******************* *******************	**
	***** *****	***********	****** ******************* ***** *******************	**
	****** ********	********* *********	******************* *******	**	*

ㅇ 물가변동 조정내역 총괄표

구 분		조 정 금 액		비 고
		보차도교	보행교
① 물가변동 대상공사의 계약금액		***************	***************
② 물가변동 적용 제외 금액		***************	***************
물가변동 조정기준일 현재 공정율	예정공정률	******	******
	실행공정률	******	******
	제외공정률	******	******
③ 물가변동 적용 대가		**************	************	*****
④ 품목조정율		*****	*****
⑤ 물가변동 등락 대상 조정 금액		************	***********	*****
⑥ 선금급 공제금액		*	*
⑦ 기타 공제금액		*	*
⑧ 물가변동 조정 적용금액		************	***********	*********

□ 검토결과 및 조치계획

ㅇ ***********************************************************************************************************************

붙 임 : 건설사업관리단 물가변동 계약금액조정 검토 보고서 각 1부. 끝.