문서번호	에스플렉스센터운영과-4435
결재일자	2024. 6. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
최경호		서재호	06/10
			임승철
협조
	기획관리과장		조윤홍

에스플렉스센터 UPS 축전지 구매(교체) 설치 변경계획

2024. 6.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 UPS 축전지 구매(교체) 설치 변경계획

에스플렉스센터 노후 축전지 교체와 관련 일상감사 결과 및 재무과 의견을 반영하여 물품과 전기공사로 분리 발주코자 보고드림

□ 추진근거

○ 에스플렉스센터 UPS 및 배터리 연차별 정비계획【에스플렉스센터운영과-5950('23.8.8.)】

○ 에스플렉스센터 UPS 축전지 구매(교체) 계획【에스플렉스센터운영과-3450('24.4.30.)】

○ 일상감사 의견서 송부【에스플렉스센터운영과-3631('24.5.7.)】

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 에스플렉스센터 UPS 축전지 구매(교체) 설치

*************************************

****************************

○ 사업기간 : ΄24. 4월 ~ 9월

○ 사업내용

**************************

*****************

***********************

****************

**************************

○ 예산과목 : 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사유지관리,

에스플렉스센터운영, 시설비및부대비, 시설비

□ 변경사항 및 사유

○ 변경 사항 : 당초 물품구매에서 물품구매와 전기공사로 분리 발주

○ 변경사유 : 일상감사 의견서 및 재무과 의견 반영

◇ 일상감사 의견서 발췌 ◇

~ 물품과 공사 혼재사업에 해당하는 바, ｢전기공사업법｣ 등 관련 법령과 상기 규정에 따라 과업을 면밀히 검토하여 전기공사업 면허가 필요한 공사 관련 과업의 분리 발주에 대해 검토하고 재무과와 협의 후 추진하도록 의견제시

◇ 재무과 의견 ◇

지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 제282호, '24.3.28)

- 제1장 입찰 및 계약일반기준 제1절 10. 물품·용역·공사가 혼재된 계약의 집행

다. 계약담당자는 ｢건설산업기본법｣, ｢전기공사업법｣, ｢정보통신공사업법｣ 등 공사 관련 법령에 따라 계약목적물이 공사가 명백함에도 물품·공사 또는 용역·공사의 혼재된 계약으로 판단하여 물품 또는 용역으로 발주하지 않도록 주의하여야 한다.

□ 변경계획

물품구매 사업개요

○ 사 업 명 : 에스플렉스센터 UPS 축전지 구매

○ 사업기간 : ΄24. 6월 ~ 9월

****************************************

****************

******************

전기공사 사업개요

○ 사 업 명 : 에스플렉스센터 UPS 축전지 교체 설치

○ 사업기간 : ΄24. 6월 ~ 9월

************************************

*****************

*****************

□ 향후계획

○ ΄24. 6월 : 물품 및 전기공사 계약의뢰

○ ΄24. 9월 : 축전지 설치 완료

붙임: 설계내역서(물품 및 전기공사) 각 1부. 끝.