문서번호	시설과-2270
결재일자	2024. 6. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	중부공원여가센터소장
여인용	전준홍	이정환	06/11
			代정재연
협 조

남산공원 이동식 화장실 기반시설공사

준공기한 연기 검토보고

2024. 06.

중부공원여가센터

(시   설   과)

남산공원 이동식화장실 기반시설공사 준공기한 연기 검토보고

우리 센터에서 시행 중인「남산공원 이동식화장실 기반시설 공사」와 관련, 화장실 주변 안전관리를 위한 차폐식재 및 주변 정비 공사 등 설계변경(추가) 사항이 발생하여 준공기한을 연기코자 함.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 남산공원 이동식화장실 기반시설 공사

ㅇ 공사기간: 2024. 04. 11 ~ 06. 19.

ㅇ 공사내용: 이동식 화장실 설치를 위한 정화조, 상·하수도 연결 및

화장실 기반시설 설치 공사 등

ㅇ 총공사비 :********************************************

ㅇ 계약상대자: ***********************************

******

*******

*********************************************************

***********************************

*******

*************************************

********************************************

******************

******************

□ 보고자 의견

ㅇ 상기내역과 같이 준공기한을 연기하여 안전한 작업환경 조성 및 공사품질 향상에 만전을 기하고자 함.

붙임  남산공원 이동식 화장실 주변 정비계획 1부.