아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	'별관3층 외 2개소 환기설비 교체공사' 설계변경 시행 및 재계약 의뢰

1. 총무과-8825(2024.6.7.)호 관련입니다.

2. 위 호 관련하여 별관3층 외 2개소 환기설비 교체공사 사업에 대하여 아래와 가팅 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 별관3층 외 2개소 환기설비 교체공사

나. 도 급 자 : **********

다. 계약기간 : 2024. 4. 26. ~ 2024. 6. 29.

라. 변경내용 : 물량감소 및 보험료 정산에 따른 계약금액 감액

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	**********	**********	***********
부가가치세	*********	*********	*********
도급금액	**********	**********	***********
결정금액	**********	**********	***********

마. 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비 확충 및 청사 환경개선, 시설비및부대비, 시설비(기계장치)

따로붙임   1. 설계변경 심의결과보고 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 계약금액 조정 검증확인서 1부.

4. 산업안전보건관리비 사용내역서 1부.

5. 합의각서 1부.   끝.

	경 영 관 리 부 장
주무관	김상훈		총무과장	박은섭		경영관리부장	06/10
안병희
협조자	청사팀장	곽대근		주무관	김경호		주무관	김영화
시행	총무과-8869	(	2024. 6. 10.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 경영관리부 청사관리팀	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1136	/전송	02-3146-1149	/	ksh2605@seoul.go.kr	/	부분공개(5)