급수공사 연기 보고서(신설-146,147)

시    행

급수운영과-9071

시행일자

2024. 6. 11.

수 신 자

내부결재

접수번호

접수일자

공개여부

부분공개(6)

주무관		급수운영과장				결재
김병국		06/11
		代양재덕
협 조

명에 의거 마천동 외 14개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 합니다.

□ 공사현황

○ 공　사　명: 2023년 마천동 외 14개동 상수도공사

○ 계약상대자: 주식회사웅진건설산업 대표 유기정

□ 연기내역

연번	주 소	지시번호	당초	변경	비고
1	**************	신설-146	2024. 5. 7. ~2024. 5. 24.	2024. 5. 7. ~2024. 5. 31.	1차
				2024. 5. 7. ~2024. 6. 15.	2차
2	**************	신설-147	2024. 5. 16. ~2024. 5. 31.	2024. 5. 16. ~2024. 6. 15.

○ 연기사유

- 수요가의 시공일정 연기요청으로 인한 공사연기

□ 지체상금 부과여부

○ 지체상금 미부과

□ 조치의견

○ 변경 공사기간으로 연기.

끝.