문서번호	시설보수과-2504
결재일자	2024. 6. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	난지물재생센터소장
최승호		代김도형	06/11
			이문주
협 조

슬러지1,2처리장 시설물 철거

설계변경(정산) 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024년 6월

난지물재생센터

(운 영 과)

슬러지1,2처리장 시설물 철거공사

설계변경(정산) 계획보고

우리센터에서 시행중인 슬러지1,2처리장 시설물 철거 공사 시행중 설계변경 사유(정산) 발생에 따른 조치계획 보고입니다.

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 슬러지1,2처리장 시설물 철거 공사

○ 계약금액 : ************

○ 공사기간 : 2024. 5. 16. ~ 2024. 6. 13.

○ 계약업체 : 나영토건주식회사********

□ 설계변경 사유 및 금액

○ 설계변경 사유

- 제경비 정산 차감액 발생 **************)

□ 설계변경 금액

(단위 : 원)

공 종	금 액		증 ․ 감	비고
	당 초	변 경
총 공 사 비	34,513,000	33,957,000	감)556,000	제경비차감
공급가액	31,375,455	30,870,000	감)505,455
부가가치세	3,137,545	3,087,000	감)50,545

□ 설계변경 세부내역

구 분			당초금액	변경금액	증·감금액	구성비(%)	비 고
순공사원가	재료비	직 접 재 료 비	*	*	*	*****
		소 계	*	*	*	*****
	노무비	직 접 노 무 비	**********	**********	*	*****
		간 접 노 무 비	*********	*********	*	****
		소 계	**********	**********	*	*****
	경 비	경 비	*	*	*	*****
		안 전 관 리 비	*******	*******	*********	****
		산 재 보 험 료	*******	*******	-	****
		고 용 보 험 료	*******	*******	-	****
		건 강 보 험 료				*****
		연 금 보 험 료				*****
		노인장기요양보험료				*****
		기 타 경 비	*********	*********		****
		소 계	*********	*********	*********	****
소 계			**********	**********	*********	*****
일 반 관 리 비			*********	*********	********	****
이 윤			*********	*********	********	*****
총 원 가			**********	**********	*********	*****
부 가 세			*********	*********	********	****
총 계			**********	**********	*********	*******

□ 조치계획

○ 위 변경사유와 같이 재경비(산업안전보건관리비) 정산을 위한 설계변경(변경계약)을 하고자 합니다.

○ 행정사항

-  우리센터 관리과에 설계변경 계약요청

붙임 :  1. 설계변경 내역서 1부. 끝.