아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(오수관로 및 압송관로 이설에 따른 실시설계 용역비 반영 승인 통보)

1.업무지시현장: 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사 (구룡교 확장) (장기1차) (주)효상토건, 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사 (구룡교 확장) (장기1차) 주식회사 이산

2.작 성 일 자: 2024-06-11 17:06:43

3.지 시 내 용

가. 제2자유로 2024-46(2024.06.07.)호와 관련입니다.

나. '오수관로(D800㎜) 및 압송관로(D1,000㎜) 이설에 따른 실시설계 용역비 반영' 실정보고에 대하여 승인통보 하오니 공사추진에 차질이 없도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

주무관	백부현		토목총괄과장	06/11
박운용
협조자
시행	토목부-11608	(	2024. 6. 11.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 토목부(12층)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2114	/전송	02-6438-2199	/	buni1107@seoul.go.kr	/	대시민공개