현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
		성 북 구
수신자		내부결재
(경유)
제목	계약변경 요청(보문사 내 숲속도서관 인테리어 공사)

1. 문화체육과-19698(2024.6.10.)호와 관련입니다.

2.「보문사 내 숲속도서관 인테리어 공사」추진 중 소요금액 변동사항에 대하여 계약변경을 아래와 같이 추진하고자 합니다.

가. 계 약 명: 보문사 내 숲속도서관 인테리어 공사

나. 계 약 자: 큰빛종합건설 주식회사(대표: 김현철)

다. 변경사항

분류	기존	변경	비고
계약금액	439,236,900원	467,932,500원	증)28,695,600원

라. 변경계약 사유

- 바닥모르타르 타설 및 간접등, 필름 설치 등 물량 변동

- 유리칸막이, 원목마루 설치 등 자재변경 발생

마. 예산과목: 문화체육과, 문화예술진흥 및 문화유산보존전승, 책 읽는 성북 조성, 보문사내 숲속도서관 조성, 시설비및부대비, 시설비

붙 임  1. 검토보고 방침서 1부.

2. 실정보고 자료 1부.

3. 설계변경사유서 1부.  끝.

주무관	이상희		문화시설담당	김하연		문화체육과장	代신봉근		행정문화국장	06/12
임근수
협조자	계약담당	조은숙		재무과장	우경죽
시행	문화체육과-20049	(	2024. 6. 12.	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168, 7층 문화체육과	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-2643	/전송	02-2241-6536	/	tkdgml59@sb.go.kr	/	부분공개(5)