문서번호	시설보수과-5100
결재일자	2024. 6. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
김민호		06/13
		안종필
협 조

2024년 중랑물재생센터 차집관로 및 하수시설 준설공사(연간단가)

설계변경(1회) 검토보고

2024. 6.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2024년 중랑물재생센터 차집관로 및 하수시설 준설공사(연간단가)

설계변경(1회) 검토 보고

「2024년 중랑물재생센터 차집관로 및 하수시설 준설공사(연간단가)」의 설계변경(1회) 사항을 아래와 같이 보고함.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 2024년 중랑물재생센터 차집관로 및 하수시설 준설공사(연간단가)

❍ 공사기간 : 2023. 12. 27. ~ 2024. 12. 31.

❍ 도 급 비 : 금1,107,199,720원

❍ 공사개요 : 준설 7,550㎥, 부대공 1식

❍ 도 급 자 : (주)천일이엔에스 대표 황기진, 보영건설(주) 대표 정순민

□ 보고내용

❍ 설계변경 사유 : 시공물량 증·감

❍ 주요 설계변경 내용

공 종	규 격	단 위	수 량				비고
			당 초	변 경	증·감
준설토 뒤집기/집토	BH07㎥	㎥	3,000	1,190	감	1,810
기계준설(L=103m)-야간	로더0.25㎥+BH04	㎥	2,500	1,000	감	1,500
백운동준설(야간)	흡입준설+소운반	㎥	200	800	증	600
스컴준설	흡입준설	㎥	1,000	4,300	증	3,300
홉입준설(주간)	흡입준설	㎥	-	200	증	200

❍ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감		비 고
총공사비		1,207,199,720	1,207,199,720		-
도급비	공급가액	1,006,545,200	1,006,545,200		-
	부가가치세	100,654,520	100,654,520		-
	계	1,107,199,720	1,107,199,720		-
이 전 비		100,000,000	100,000,000		-

□ 조치계획

❍ 상기 내용에 대하여 설계변경(1회) 시행코자 함.

붙임 1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경사유서 1부.  끝.