문서번호	급수운영과-10718
결재일자	2024. 6. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
양동혁	신정우	전결 06/13
		채재일
협 조

공사 실정보고 검토보고

[2024년 공덕동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사]

2024. 6.

서부수도사업소

(급수운영과)

공사 실정보고 검토보고

[2024년 공덕동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사]

급수운영과장 :채재일☎3146-3640 급수관리팀장 : 신정우☎3649 담당 : 양동혁☎3648

「2024년 공덕동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사」추진 중 감독기관으로부터 제출된 공사 실정보고 건에 대한 검토 결과를 보고드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2024년 공덕동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사개요 : D=80~200㎜, L=1,476m

ㅇ 공사기간 : 2024. 4. 1. ~ 2024. 12. 6.

ㅇ 계약금액 : 568,616,800원

ㅇ 시 공 사 : 태성건설 대표 홍영인

ㅇ 감 독 자 : 서울시설공단 전유혁

□ 관련공문

ㅇ 현장 실정 검토보고서 제출(공덕동, 1회) (공사감독2처-7122, 2024. 6. 11.)

□ 보고내용(서울시설공단)

ㅇ 3구간 작업시간 변경(당초 : 주간공사 -> 변경 : 야간공사)

- 당초 3구간(D=200㎜, L=216m, 보도 폭(B)=1.2m)은 주간공사로 설계되었으나, 공사 시행에 따른 사전협의 시 공사에 따른 영업손실 배상 등 구간 내 상가의 민원이 다수 발생하여 시민불편 최소화를 위해 야간공사로 변경이 필요한 실정임

- 개략공사비 검토

구 분	당 초	변 경	증 / 감
도급비	약 47,894천원	약 91,751천원	(증) 43,857천원

ㅇ 위치도 및 현장사진 (3구간)

위치도 및 현장사진

□ 검토의견

ㅇ 상기 보고내용과 같이 주간공사에 따른 영업손실 등의 민원 발생이 예상되는 3구간에 대하여 실정보고와 같이 야간공사로 변경하여 시공함이 타당하다고 판단됨

ㅇ 다만, 야간공사에 따른 소음 민원 발생 우려가 있으므로 현장여건에 따라 주·야간 병행하여 시공토록 승인 통보코자 함

붙임  서울시설공단 현장 실정 보고서 및 관련 서류 각 1부.  끝.