문서번호	정수과-5674
결재일자	2024. 6. 12.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
홍기웅		代김광묵	06/12
			서한호
협 조
	행정관리과장			박세중
	주무관			양은영
	주무관			이구연

사업장폐기물(무기성 정수오니) 처리용역

('23. 6.~'24. 5.) 변경계약 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024.  6.   .

뚝도아리수정수센터

( 정 수 과 )

『사업장폐기물(무기성정수오니) 처리용역

('23.6.~'24.5.) 변경계약 계획 보고』

『2023년 6월부터 시행중인 사업장폐기물 처리용역(장계계속 단가계약)』과 관련하여 처리물량 변동에 따라 계약금액을 변경한 후, 본 용역을 완수처리하고자 함.

□ 용역계약 현황

○ 계 약 명 : 뚝도아리수정수센터 사업장폐기물(무기성 정수오니)처리용역

○ 용역기간 : 2023. 6. 1. ~ 2024. 6. 15.

○ 계약업체

구 분	상 호	대표자	주 소
처리	*******	***	****************
운반	*********	***	***********************

○ 계약금액 : *************

구 분	합계	2023년 (6.1.~12.31)	2024년 (1.1.~5.31)	비고
금 액(원)	***********	***********	***********
처리물량(톤)	******	*****	*****

※ 처리단가 :**********************************************************

□ 변경계약 내역

○ 변경사유 : 사업장폐기물 처리용역(2023. 6. 1. ~ 2024. 6. 14.) 계약종료에 따른 2차분 및 총차분 계약금액 변경

○ 처리물량 변경 내역

구 분		당 초 (톤)	변 경 (톤)	증, 감	비 고
총용역물량(톤)		14,000	13,013	감 987톤
차수별	1차(2023)	7,080	7,080	변경없음
	2차(2024)	6,920	5,933	감 987톤

○ 계약금액 변경 내역

구 분		당 초(원)	변 경(원)	증, 감	비 고
총계약부기금액(원)		779,408,000	722,255,220	감 57,152,780
차수별	1차(2023)	394,157,710	394,157,710	변경없음
	2차(2024)	385,250,290	328,097,510	감 57,152,780

○ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축

아리수생산재료비, 수선유지교체비, 수선유지비, 정수비

(슬러지케익 처리비)

□ 행정사항

○ 2024. 6. 13. : 변경계약 의뢰 예정(행정관리과)

붙 임 : 1. 설계변경 내역서(안) 1부.

2. 합의서(안) 1부.  끝.