문서번호	급수운영과-8688
결재일자	2024. 6. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
서동민	代전소영	06/14
		代류태현

사토장 변경 검토 보고

(2023년 대학동 외 10개동 상수도공사)

2024.  06. 13. (목)

남부수도사업소

(급수운영과)

사토장 변경 검토보고

과장 :이용구☎3146-4540 팀장 :김윤환☎4554 담당 :서동민☎4564

우리사업소에서 시행중인「2023년 대학동 외 10개동 상수도공사」에 대한 현장 실정보고서가 제출됨에 따라 검토 후 결과를 보고 드림.

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명 : 2023년 대학동 외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

ㅇ 공사기간 : 2023. 5. 29. ~ 2024. 6. 30.

ㅇ 공사개요 : D=15~300 mm, L=1,262 m

ㅇ 계약금액 : *************

ㅇ 계 약 자 : **************

□ 실정보고내용

ㅇ 사토장 변경

-	본 공사의 잔토처리는 수도권매립지로 설계되어 있으나, 수도권 매립지 관리공사의 토사반입 불가 통보로 인하여 사토장에 잔토처리 하고자 함.

※ 반입불가 사유 : 부적합(이물질 혼합) [관련문서 : 매립부-3392(23.12.27.)]

***********************

□ 승인요청사항

ㅇ 사토장 변경

- 당 초 : 집하장 ~ 수도권매립지(운반거리 L=45.1km)

- 변 경 : ***************************************

□ 검토의견

ㅇ 사토장 변경 = 승인

- 조정금액 검토 : 변경된 운반거리에 낙찰율을 적용하여 적정하다 판단됨.

명 칭	당초	변경	증⦁감	비 고
잔토처리 (0.7상차비별도)	19,958	15,487	-4,471

- 운반경로 검토 : 운반경로 검토결과 이상없음.

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ 차량의 속도는 표준품셈(공통부문/건설기계8-2-8) 속도를 적용할 것.

- 관련서류 검토 : 토지대장 소유주 및 영농성토에 따른 개발행위허가자의 승인을 득하였으므로 이상없음.

**********************************

ㅇ 계약금액 증감사항 : 감 4,980천원

- 운반거리 감소에 따른 잔토처리 비용 감액

ㅇ 관련근거[운반거리 변경에 따른 설계변경]

- 지방계약법 시행령 제75조 1항(그 밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)

공사기간 ⦁ 운반거리의 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위에서 조정한다.

- 공사계약일반조건 제23조 1항(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)

⦁⦁⦁(지방계약법 시행령 제75조 1항과 내용동일)⦁⦁⦁

실비를 초과하지 아니하는 범위안에서 이를 조정하며, 계약예규 「정부입찰⦁계약 집행기준」제16장 (실비의 산정)을 적용한다.

- 정부입찰⦁계약 집행기준 제16장 제74조 2항(운반거리 변경에 따른 실비의 산정)

계약담당공무원은 토사채취 사토 및 폐기물처리등과 관련하여 당초 설계서에 정한 운반거리가 증ㆍ감되는 경우에 다음 각호의 기준에 의하여 계약금액을 조정한다.

3. 당초 운반로 전부가 변경되는 경우

ㆍ조정금액 = (계약단가 + 변경된 운반거리를 변경당시 품셈을 기준으로 산정한 단가와 동단가에 낙찰율을 곱한 단가의 범위내에서 계약당사자간에 협의하여 결정한 단가) - 계약단가

- 지방계약법 시행규칙 제74조 1항(그 밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)

공사기간 ⦁ 운반거리의 변경 등 계약내용의 변경은 그 계약의 이행에 착수하기 전에 완료하여야 한다. 다만, 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약이행의 지연으로 품질 저하가 우려되는 등 긴급하게 계약을 이행하게 할 필요가 있는 경우에는 계약상대자와 협의하여 계약내용 변경의 시기 등을 명확히 정하고, 계약내용을 변경하기 전에 우선 이행하게 할 수 있다.

□ 조치계획

ㅇ 현장 실정에 따른 변동사항은 추후 설계변경 시 반영하고자 함.

- 공사계약일반조건 제20조 2항(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

발주기관이 설계변경을 요구한 경우에는 제1항에도 불구하고 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액의 범위안에서 발주기관과 계약상대자가 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의(이하 "협의"라 한다) 하여 결정한다.

붙임 1. 토사반입 불가 회신 공문 1부.

2. 현장실정 보고 1부.

3. 기타 증빙서류 1부.  끝.--ENCRYPTED_CLIPDATA-->/fSzy4G6BaeP991BcOCbApswvTS98wVzRfHw76A+RdMIjwtt9Xz7bkcVM2dH1Eb57rOWMLeXgW8Zbnfz1vD9WJjhdGqDDblu2GQ1r8zU4lPyIP5ranl7eJiQvOvbMmugt4qHEnMu9gx52wxmADRtCeeDgRpGe/PweMT0GrRxFuNStgWKd0nZPolnAqtBQRR/BcujFwoGRgsHk3A7G0UhLFldMk0zWjQoANxLFiGsZraVWAjLpihnkPaf3OHJuw0ofr3WaVf87jjhddlxMBfM/YXE48PQDvVczEMCXeOU25e8AZpFi419Lc3jbntGuusRw/xqo+fAsV1OHVXaij2+JbzR7hV799+IHhjwqrn/x4G+kIxLds0LLwlZgFxGO9/VEyeq5MWi2D3NpVYo1SThcJsUMBrgnn0ZD5xDED4ymyRQjHfRKvkTin2T65cn3V/hmR0ydBifpfacs8IZNHO7fTQvTCXYtONTedKhB8ACbybCDgt311dyIOjUITslQwDyTLr9hQlLfccDDh3goKlFTihw5fomvxNDjFRc9TZ6M02of4DuGhoR9E9kjkR+H4j2UpsPIIB7viX9fdJ0DSGHi36dE2DTzObkuI5L72iNsPameRbJwT9zYDqogOYbPhOb2FfaSKLlTmcUTA8que3o3H31nKZkt/rJ6qhSrZlO9FZhIaKTDViddl0MPUt9nKAgQg6cnQhoa12k9HgVrERQ6xCaawjx8uxy0CS5URg8WUioQiTOXcLKqsa+Lhb2S/tLrKEDVyB41ppaprvuRELmals1Y632unDbxuijwfgO6EtfrbZs5CUDupe6XVoi71zG9/SuvZUmbq10OJxoADUA5XKcot84G9L2yjn+uh5dCItr5aSwGKy+fLYogNWqYVaHnH3OcrSJ0asrj3k5IwZBbeRNiAhkZyWi1IS3RLg55aIDIttar/aAJOhwTg/icb3SOFcfgVRbZ7y6fs0ZN4xI9+oBE6oAGHeRbcEUmLQAk+4xhuUEA9PoPi1Zs20CmMuXAJNH7VhvZKnQ/IhwCUO73+lppwRUftMwynH+TnPCfBnLvI8yS8z1jG640a+0VCViQ0WbLxjnnEDC2ydMZQ0bZj6BOLVBhoxgylYgdTPn94XJcovhgPH6eHPbHLLDORs/7sVLABgM77EDUnvtCIle4S9ISpvPs6Q0cqz6Aue539DSeND0ziUQih6z9uOja8VmaEn5mkRb32Uu+3CB7d9tunvqnYNJAKAAflOHNg0v00ZqCwfrWmViBq9FT4/P06rmDvRHygipCD1ko9ylxPHeDimRWwY3u3iuxdGES79kipkO5zrkFpGG41RTQB8tfzKC7It1kQcRPl0h/j+TQ2D2QVC5nN/w0ami1UEnz3etM5pJWbebcebLjAGkk2b/TaR+hzijQi8JRBNy3E86+cpDf90TNSob3D4HswaHwyRVyjl86g/SeVeDsaEs4n7Tzhj9/CJGHPMCrFjfDIcMFwe4voRFBi5yr22fDIa21G4aj1lXPU+bJUKMMqghqRUXRy7y46GH+cQQJhvQDPtKRc+UZ/0jvGiO9qFgr5QEk4y4G2RVuTm6UUCwdTN8AhGr5RLhHzOjSWCfK8/UrOGySav7SCVgR0roJAEaOb4CamA8Zr7NaV+6nfbse78GAVl/bdz5S7OItMcfRLlzL1wOwUw3JBAX0BIC7yMqUu08qW586b6ElBU29OCaPiOBeCfd1nFYmqrx0boyhr6eYpcrK9/p5hFtiCYq33ZTcNdMn3PbA0JdOIIezCvOiCCIpyxz3gtvpFLNKTMg2JrYJrrUs/c3OPNIp2AeNzBHkRCPYG7XyZQU27ITZnTYGVe7YdcPMmlXwE9PIfIfGGb2JADgM+dvUSjX95g8PsalhTWsRF0yUYRDw301xKBSFp+3Zt9Rr1C9BshnDop4ikM/TsjRtP6TFtRMtH6fkE7tP2xBlmGzWt/S1Ofu9Hka0Uoppm+xruHtnZyHTDvRqoFbzg3mIMAENnPm3QI+fzNjLCJgmtvbuRlZW51LeiYgD7TTEO1RYf7QT9oktGYsaj5xLm4+Tq3sgLMtLDEw75rSQBclAJ1N7ZD03ZZaz0oMDubqHX0UWJX1Zi5FXbhCTaV7Rql52PO4Pi4JQ22iGrSS/3e080YrbfKI+67oK2duP+j1lWhf/ml8u2o0tU78C05TQHgq3ArjdwD2qzvh721P5FkmKyIhU7n52QKCuT+FxdfvMotoIj+MH1xs7u1e+DWh6JLqnjxfEO5df/iKD8EvxtfsRC7DbxLifqscKhnIMDj5NAs1E/jCZWjUkLtgD7PGaBBDCCm+MQwWuH0cPX8s1g9ZohArlQfAX/TrGqPbz3vl19qGZiLsOoRxRS7kZ61UL7dNKyK5tbm7a851dMB1UBvSImW9HZsuP8v3prR9PhUW8NPRTnKASD/fbPjPoyUwN2TZ2HHgy3zjtl2WWK5lQwbvSZnXVtNhlb4jN5HqsNkAvd4uPi9xY6VFeRX6Fg5lu8njU4Tw13/LOWGk5ohiAB9yUUeeEqZ59dJLf9vE5x4jeiuRE2zd0YqUN1GS2rojX/cnR8PiAZ/6ookdlJ50Rnzo/wxI5THrHPlN1Pj/nYQyoNbGQ/LTZ9R6fjZf1XRVjCH28UbqprY8ihFn4UXBs9HCBIFKcuKVVSLF0ReQIxEkQ6JXhFIUXs7nhgxid2nRBtcG6vi7gjpwOoe6gFzGSA5AuDmskz7FV9UvHCWLrqmH80D2q1f3bgF0aoVPT3K7VyV+BH3YxhcE7PtCeU0H4Oa9g2P5K08bc0iYYhhOyFlfvNkV+XnNKhVYjpS77tFJWGzn5An1Pm6z5HipjNF2OAg311fVZx/eY74Mdc1qfT7QSdqzEEHSmhIKp7fkZDKDtSHQNaYClGzBTGNpAwBB7S+gpoaNiO10OMWmz5sBsdjvpDkurX49QwPpffGR90pEHIAbXwya7PqdF98xzUnrYTslW8dmT+EyAhBcRzyN3gXy9nyR5hzJodI/59PDPONVgQ1VwKJbUD2MSd1lkxbP77tnLN6XrJSZlWIlRlx03KnypcGb/PAQOJHeENKWEYF1nokXgc+wDRBG+kDgrsuR0/7ISWUpZGGPD6nvLJWx2ov8quTbQX1Vrhi3uGHms9j/dBFBQTMG9+Yg0NmkFHKGo4HtqpRvp6BxA8xEnRSCuavVHyPxlTAptgRMUYrA1+SOUhWxp+7HX0fSTLsdxJekHV4cAEAMwFz/Fjw9KCS2hvqiC+OVNVes/RQ6/eyFJOjcRjx680OhcqkSNohD290hWzVk8wrFwRCuRVkX/0Pxg8U9nrr1M1ad3U6C4qB0Ck3N0qDEki/q+jTuYLuyR54R6MbqriiXijS3ZoaL8XVqmghKo9mzGBlIIX4y9JJTs228PW9sjJ7NxNa5dQibkM+zH4VTkhi0+GjevlLtNyBimPMsfsQz5GsMYs6FrGQEM8e+2va6FcCEYyN4b6rRolItE4Ul6OE3mB/qZMbL4wXYZlmKlAyhXEBXHtAJLFakcEBh6W+SlQ2toWJdpXtL7ee73O2s0/KdBs7v5Fc=