문서번호	시설보수과-2553
결재일자	2024. 6. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	난지물재생센터소장
최승호		장태옥	06/13
			이문주
협 조
	시설팀장			김도형

슬러지1,2처리장 시설물 정비공사 설계용역

설계변경(1차) 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024년 6월

난지물재생센터

(운 영 과)

슬러지1,2처리장 시설물 정비공사 설계용역

설계변경(1차) 계획보고

우리센터에서 시행중인 "슬러지1,2처리장 시설물 정비공사 설계용역"중 설계변경 사유 발생에 따른 조치계획 보고입니다.

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 슬러지1,2처리장 시설물 정비공사 설계용역

○ 계약금액 : ************

○ 공사기간 : 2024. 4. 8. ~ 2024. 6. 16.

○ 계약업체 : *******************

□ 설계변경 사유

○ 설계변경 사유

******************************************************************************

****************************************

□ 설계변경 금액

공 종	변경사항		증 ․ 감	비고
	당 초	변 경
총공사비	20,711,000원	20,711,000원	0	변경사항없음
계약기간	2024. 4. 8. ~ 2024. 6. 16.	2024. 4. 8. ~ 2024. 7. 16.	30일증가	계약기간연장

□ 조치계획

○ 위 변경사유와 같이 설계변경을 하고자 합니다.

○ 행정사항

-  우리센터 관리과에 설계변경(계약기간 연장) 계약의뢰.  끝.