문서번호	문화재관리과-8736
결재일자	2024. 6. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	한양도성관리팀장	문화재관리과장	문화본부장
강남규	이승철	김건태	06/17
			최경주
협 조
	주무관		김창건

『한양도성 인왕곡성 성벽 붕괴구간 해체‧보수 공사』

국가유산수리 상주감리용역 시행계획

2024. 06.

문 화 본 부

(문화재관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

『한양도성 인왕곡성 성벽 붕괴구간 해체‧보수 공사』

국가유산수리 상주감리용역 시행계획

문화재관리과장 :김검태☎2133-2650 한양도성관리팀장 :이승철☎2659 담당 :강남규☎2671

「한양도성 인왕곡성 성벽 붕괴구간 해체‧보수 공사」 시행에 따라 국가유산 상주감리 용역을 시행하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 추진근거

ㅇ 한양도성 인왕곡성 성벽 붕괴구간 해체‧보수 공사 시행계획

(문화재관리과-7423호, 2024.5.21.)

- 인왕곡성 붕괴구간 및 주변부 해체보수(L: 24m, H: 6~7m)

공사 개요

〇 공 사 명 : 한양도성 인왕곡성 성벽 붕괴구간 해체‧보수 공사

〇 공사위치 : 서대문구 홍제동 산1-1 일대(한양도성 인왕곡성 내)

〇 공사기간 : 착수일로부터 24개월(’24.7월 ~ ’26.7월)

〇 총 사업비 :************

(단위 : 원)

구 분		총사업비	1차(2024)	2차(2025)	비고
총계		*************	*************	*************
시설비		*************	***********	*************
	공사비	*************	***********	*************	***
	폐기물	**********	*	**********
감리비		***********	***********	***********
시설부대비		*********	*********	*********

- 예산과목 : 문화본부 문화재관리과, 문화유산 보존·정비, 한양도성 보존·정비, 한양도성 인왕곡성 성곽보수, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 추진경위

ㅇ '22. 11 ~ '24. 2 : 설계용역 및 문화재청 설계승인

ㅇ '24. 5.29 ~ 6.14 : 본 공사 입찰공고

Ⅱ		시행계획 국가유산수리 상주감리용역

□ 근거법규

ㅇ「국가유산수리 등에 관한 법률」제38조 및 시행령 제18조(감리대상 등)

⇨ 국가유산수리 예정금액 20억원 이상 → 국가유산수리 상주감리

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 :「한양도성 인왕곡성 성벽 붕괴구간 해체보수 공사」

국가유산수리 상주감리 용역

ㅇ 용역내용 : 국가유산수리 공사 전반에 대한 감리

ㅇ 용역금액 : *******************

- 국가유산수리 감리대가기준에 의거 정액적산방식 적용

- *********************************

(단위 : 원)

구 분	예 산	1차	2차	비고
문화재 감리	***********	***********	***********

ㅇ 용역기간 : 착수일로부터 25개월

ㅇ 입찰(계약)방법 :***************************

ㅇ 입찰참가자격

- ************************************************************************

ㅇ 낙찰자 결정방법

- ************************************************************************************

*******************************************************************************************

Ⅲ		향후 추진계획

		본공사	국가유산수리 상주감리
’24. 6월	1주	****
	2주	*********
	3주	****	****
	4주	******	****
’24. 7월	1주	****	****
	2주	*	**
	3주	**
	4주

붙 임 : 1. 용역비 산출내역서 각 1부.

2. 과업내용서(안) 각 1부.  끝.

2. 1-1 용역비 산출서(한양도성 인왕곡성 성벽 붕괴구간 해체보수 공사.(안)-최종 1부.