아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	추산금액 변경 요청[낙성대배수지(1지) 내부방식 공사]

1. 급수운영과-7746(2024.5.28)호 및 행정지원과-12626(2024.6.17)호와 관련입니다.

2. 위 대호에로 시행한 설계변경 및 차수별 계약금액 변경 계약 의뢰, 변경 분할     납품요구서 송부와 관련하여 아래와 같이 계약금액 및 관급자재(도막방수재)      구매비의 변경(추산)을 요청하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경 및 차수별 계약금액 변경                             (단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감
도급비	총부기금액	*************	*************	************
	1차수 금액	***********	***********	*************
	2차수 금액	***********	***********	*************

-  사유 : 공사현장 상태와 설계서 상이 및 시공여건 변화에 따른 물량변동

나. 관급자재(도막방수재) 구매비의 변경

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감
관급자재비 (도막 조달구매)	***********	***********	************

- 사유 : 조달공급 물품의 수량이 현장실측 결과 설계서와 상이하여 물량변경

- 납품요구번호 : 12-23-6-00590-00

- 계 약 자 : **********

- 품    명 : 기타방수재

- 구매규격 : 기타도막방수재, 티오켐, THF-51-O, 15kg/통

다. 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수 공급, 시설물관리 최적화,

배수지 내부방식, 수선유지비(배급수비)

붙임 : 1. 설계변경 및 차수별 계약금액 변경 계약 의뢰 1부.

2. 변경 분할납품 요구서 송부 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
급수관리팀장	류태현		급수운영과장	06/18
이용구
협조자
시행	급수운영과-8939	(	2024. 6. 18.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길, 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4541	/전송	02-3146-4589	/	taehyeon@seoul.go.kr	/	부분공개(7)