문서번호	시설건설과-6016
결재일자	2024. 6. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설건설과장	시설부장
오장록		이승우	06/18
			전태호
협조
	주무관		강은영

「광암수계 배수관로 정비공사(1공구)」

실정보고「사토장 변경 선정보고」검토 보고

2024.  6.

서울아리수본부

(시설건설과)

「광암수계 배수관로 정비공사(1공구)」

실정보고「사토장 변경 선정보고」검토 보고

시설부장 : 전태호☎3146-1501 시설건설과장 : 이승우☎1490 담당 : 오장록☎1497

*******************************에 대한 실정보고를 검토하고 조치계획을 보고드림.

Ⅰ		공 사 개 요

ㅇ 공 사 명: 광암수계 배수관로 정비공사(1공구, 1차수)

ㅇ 규    모: D=300~1,800㎜, L=8.3㎞

ㅇ 공사기간: ’22. 3.21.~’27. 8.16.(1차수 ’22. 3.21.~’24. 9.25.)

ㅇ 도 급 비: 55,241,000천원(1차 17,705,000천원)

ㅇ 시 공 사: 계룡건설산업(주) 대표 이승찬 외 1개사

ㅇ 감 리 사: (주)천일 대표 김창욱 외 4개사

Ⅱ		사토장 변경개요

ㅇ 관련 근거

- 공사계약 일반조건 제20조(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서 간의 상호모순 등에 의한 설계변경) 제1항

① 공사계약의 이행 중 설계선의 내용이 불분명하거나 설계서에 누락·오류 및 설계서간에 상호모순 등이 있는 사실을 발견하였을 때에는 설계변경이 필요한 부분의 이행 전에 당해사항을 분명히 한 서류를 작서하여 공사감독관에게 통지하여야 한다.

ㅇ 관련 문서

- ****************************************************

- ******************************************************************

ㅇ ****

- *********************************************************

Ⅲ		사토장 조사 및 적정성 검토

□ 사토장 조사

ㅇ 토석정보공유시스템 사토장 검색결과(공사장 및 사토장)

- *******************************

연번	공 사 명	주 소	거리 (km)	반입 여부	비고
1	**********	*******************	****	**
2	*****************	*****************	****	**
3	************	**************	****	**
4	********************	*******************	****	**
5	**************	*******************	****	**
6	********************	****************	****	**
7	********************	*****************	****	**
8	********************	**********************	****	**
9	*******************	**********************	****	**
10	*	*********************	****	**
11	*	*****************	***	**

ㅇ*****************

구 분	①안	②안	③안
전 경
주 소	*****************	****************	*****************
거 리	****	****	****
반입 가능량	*******	*******	*******
용 도	****	******	******

□ 적정성 검토

구 분	①안	②안	③안
사토장 위치도	*
운반거리	****	****	****
면 적	*******************	*******************	*****************
반 입 가능량	*******	*******	*******
행위허가	******************	*************************	*****************
허가기간	**********************	**********************	**********************
현장특성	************ *************	******************** *******************	**************** *************
선 정	****	*	*

□ 건설사업관리단 검토의견

구 분	검 토 의 견	검토결과
******	***************************************************************	**
*****	******************************************************************************************	**
******	*	*

□ 발주처 처리의견

ㅇ *********************************************

ㅇ 토사 반입이 가능하고, 운반거리, 민원발생 우려등을 고려하여 ************************************************************************함.

Ⅳ		조 치 계 획

□ ***********************************

□ *******************************************************************************

붙  임: 1.「사토장 변경 및 선정보고」관련 실정보고 각 1부.

붙  임: 2. 토사 반입불가 회신(수도권매립지관리공사)공문 1부.  끝.