문서번호	시설관리과-14125
결재일자	2024. 6. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이동규		유세종	06/18
			이동욱
협 조
	주무관			고태우

사토장 변경 검토보고

(2024년 석관동 등 10개동 상수도공사)

2024. 06. 18. (화)

중부수도사업소

(시설관리과)

사토장 변경 검토보고

우리사업소에서 시행중인『2024년 석관동 등 10개동 상수도공사』와 관련하여 사토장 변경에 대한 실정보고가 접수되어 검토 후 그 결과를 보고드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명: 2024년 석관동 등 10개동 상수도공사

□ 공사개요: *******************

□ 공사기간: ***************************

□ 계약금액: *************

□ 수 급 자: ****************

Ⅱ		보고내용

□ 사토장 변경

ㅇ *********************************** ************************************* ******************************

□ 사토장 변경 개요

ㅇ 위    치 : *******************

ㅇ 운반거리 : *************

※ 당초 설계현황 : ***********

Ⅲ		적정성 검토

□ 사토장 선정 적정성

ㅇ 위    치 : *******************

ㅇ 운반거리 : *************

ㅇ 토 지 주 : ***

ㅇ 사토장 위치 적합여부 → 적정

- 사토장 주변 차량진출입로 있으며, 관급토사 반출 사토장으로 적정

ㅇ 개발행위허가 관련 → 적정(미대상)

- 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』제65조, 같은 법 시행령 제53조에 의거, 50㎝ 미만의 성토인 바 개발행위허가 미대상

※ 개발행위 허가서 : 허가번호 개발 제2021-102호

ㅇ 사토(토사) 반입 동의서 → 징수확인

□ 공사비 검토

ㅇ 운반거리 변경에 따른 단가 현황

구분	명칭	규격	단위	단가
**	**************	**********************	**	*******
**	**************	**********************	**	*******
**********				**********

ㅇ 검토결과 운반거리 및 소요경비가 증가하나 당초 계약단가를 적용하고 추후 발생하는 토사를 사토장으로 반출토록하고자 함

Ⅳ		조치계획

□ 변경 사토장으로 대체하도록 계약업체에 통보

ㅇ 접근 용이성 및 관련 서류 검토 결과, 사토장으로 활용이 적합한 바 계약업체에 사토장으로 대체토록 통보

□ 변동물량 및 단가는 추후 설계반경에 반영

ㅇ 공사 중 발생된 토사는 우선 사토장으로 처리하되, 추후 설계변경 시 변경물량 및 단가를 적용하여 정산 시 반영

붙임  실정보고서 1부.  끝.