문서번호	기전과-7366
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
성지창		채충일	06/19
			조현석
협조
	주무관		이래운

「23/24년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)」

설계변경(2차공사) 검토 보고

2024. 6. 19.(수)

남부도로사업소

(기 전 과)

「23/24년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)」

설계변경(2차공사) 검토 보고

기전과장:채충일☎3284-5430  담당 :성지창☎5456

「23,24년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)」와 관련하여 2차공사 시행 중 민원처리 및 현장여건에 따른 시공물량 변경 등이 발생하여 아래와 같이 설계변경을 검토·시행하고자 보고 드림.

Ⅰ		추진 근거

ㅇ「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제74조

(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

ㅇ「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제9장(공사계약 일반조건)

제6절(공사 설계의 변경) 및 제7절(계약금액의 조정)

ㅇ「23/24년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)」설계변경[1차공사] 검토 보고

(기전과-13545호(2023.12.5.))

Ⅱ		공사 개요

ㅇ 공 사 명: 23,24년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

ㅇ 공사내용: 터널 및 지하차도 기전설비 유지보수 등

ㅇ 공사기간 및 계약금액

**********************************************

*************************************************************

***********************************************

ㅇ 계약업체 : ****************

ㅇ 계약금액 : ********************

Ⅲ		추진 경위

□ 작업지시(5차 ~ 7차)

ㅇ '24. 2. 20. 작업지시(5차) 시행

ㅇ '24. 3. 25. 작업지시(5차) 완료

ㅇ '24. 4. 29. 작업지시(6차) 시행

ㅇ '24. 5. 27. 작업지시(6차) 완료

ㅇ '24. 6.  5. 작업지시(7차) 시행

ㅇ '24. 6. 17. 작업지시(7차) 완료

Ⅳ		검토 보고

□ 관련 근거

ㅇ 작업지사(5차) 완료 보고(기전과-3615호(2024.3.25.))

ㅇ 작업지사(6차) 완료 보고(기전과-6376호(2024.5.29.))

ㅇ 작업지사(7차) 완료 보고(기전과-7195호(2024.6.17.))

□ 설계 변경 내용(세부내역 붙임문서 참조)

ㅇ 계약 공종별 수량 변경 및 보험료 등 제경비 정산

□ 2차공사 집행내역: 금액변경 없음(내역변경)        (단위: 천원)

***** ****	*************			*
	**	**	**
*******	******	******	*****	*******
	*****	*****	**	****

ㅇ 예산과목: 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 주요 작업내용

*********************************

**********************************

*****************************

*****************************

*********************************

*************************************

*********************

□ (총 차)설계변경 내역                                  (단위: 원)

****	****	****	*****	**
**********************	***********	***********	*
***********************	***********	***********	*	******* ***********
**********************	***********	***********	*	*****

Ⅴ		검토 결과

□ 설계변경 검토 의견

ㅇ 5차~7차 작업지시 내용대로 작업 완료

ㅇ 실제 시공에 따른 물량 변경 및 보험료 등 제경비 정산을 적정하게

설계변경에 반영

ㅇ 위 검토 보고와 같이「23,24년 도로기전시서물 유지보수공사(연간단가_남부)-장기계속(2차)」에 대하여 준공 처리하고자 함.

Ⅵ		향후 계획

ㅇ '24. 6. 20. : 변경계약 의뢰(→ 관리단속과)

ㅇ '24. 6. 27. : 공사준공 및 대금 지급

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 검증확인서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.