아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	지체상금 부과

1. 우리 정수센터 “홍보관 강화유리난간 설치 및 로고간판 수리” 계약건과 관련하여 계약상대자의 계약이행 지체로 지방계약법 제30조 및 시행령 제90조 2항에 의거 지체상금을 부과하고자 합니다.

가. 납부자 : ****************

나. 주  소 : 강남구 논현로97길 19-6

라. 계약금액 : 49,186,800원

마. 계약기간 : 2024.5.10.~2024.6.10

바. 부과내역

준 공 일	검사완료일	지체일수	지체상금액	부과시작일	비고
2024.06.17	2024.06.18	**	********	2024.6.11

사. 금차 산출내역

산출근거	산출내역	금액(원)	비고
- 완수기한 :2024.06.10. - 검사요청일 : 2024.06.17. - 검사완료일 : 2024.06.18.	*******************	*******

붙임  1. 준공검사조서(홍보관 강화유리난간 설치 및 로고간판 수리) 1부.

2. 공사계약서 1부.

주무관	박소현		행정관리과장	김성수		영등포아리수정수센터소장	06/19
代김성수
협조자
시행	행정관리과-7915	(	2024. 6. 19.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로, 11 영등포아리수정수센터	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5611	/전송	02-3146-5691	/	number0917@seoul.go.kr	/	부분공개(6)