문서번호	급수운영과-9020
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장
류태현		06/19
		이용구
협조

『낙성대배수지(1지) 내부방식 공사』

준공기한 연기 검토 보고

2024. 6.

남부수도사업소

(급수운영과)

『낙성대배수지(1지) 내부방식 공사』

준공기한 연기 검토 보고

우리사업소에서 시행중인「낙성대배수지(1지) 내부방식 공사」와 관련하여 감독기관인 서울시설공단으로부터 준공기한 연기 검토 보고서가 제출되어 검토 사항을 보고 드림

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 낙성대배수지(1지) 내부방식 공사

○ 공사개요 : 도막식 5,423㎡, 패널식 3,625㎡.

○ 공사기간 : 2023. 8. 3. ~ 2024. 6. 30.

○ 공 사 비 : **************

○ 계 약 자 : *******************

□ 공사추진 현황

○ 공정율 : 68%[2024. 6. 18. 기준]

○ 작업완료 사항

- 그라인딩, 콘크리트 면정리, 단면보수, 폼타이 제거 단면보수,

도막식 방수방식 등

○ 잔여작업 사항 : 패널식 방수방식 및 기타작업

□ 준공기한 연기

가. 준공기한 연기 사유

○ 임시 가설전기 설치 지연(25일)

- 2023. 8. 25.(한국전력공사 접수일) ~ 2023. 9. 18.(설치일)

- 항 내 작업에 필요한 임시 가설전기를 위한 한국전력공사 전기 사용

계약 변경 신청접수 이후 실 설치 지연

- 가설전기 설치가 지연됨에 따라 항 내 조명 설치 및 밀폐공간내 환기

시설 가동 불가로 작업자의 항 내 출입이 불가하여 그라인딩 등 주요

공정의 진행이 지연됨.

○ 자재인양구 설치 지연(15일)

- 2023. 9. 11.(구조기술사 자문일) ~ 2023. 9. 25.(설치일)

- 설계도서상 자재인양구 위치가 명확하지 않아 자재인양구 설치 위치

확정을 위해 구조기술사 자문회의를 실시하였으며, 그에 따른 시공방법의 변경으로 인해 자재 인양구 설치에 대한 계획 수립 기간 반영이 필요함.

- 자재인양구 설치가 지연됨에 따라 항 내 장비 및 자재투입과 환기 설비

설치 가동이 불가하여 주요 공정의 실 착공 지연됨.

○ 내부 신축이음부 누수 발생(57일)

- 2024. 2. 23.(최초 실정보고) ~ 2024. 4. 19.(신축이음부 보수 완료)

- 항내 신축이음부 누수 발생으로 인해 후속 공정 진행이 불가하여 그에 대한 대책 수립 및 지수작업과 신축이음부 보수에 대한 추가 작업 일수 반영 필요

○ 내부 습도 증가로 인한 작업 불가일(6일)

- 우천으로 인한 도막식 방수방식의 습도 시방기준 초과 일수 산정

나. 준공기한 연기 요청

연번	연기 사유	기간	지연일수	요청일수	비고
1	임시가설 전기 설치 지연	2023. 8. 25. ~ 2023. 9. 18.	25일	25일
2	자재인양구 설치 지연	2023. 9. 11. ~ 2023. 9. 27.	15일	7일	중복기간 제외
3	내부 신축이음부 누수 발생	2024. 2. 23. ~ 2024. 4. 19.	57일	57일
4	도막공정 불가일	2024. 5. 7.외 5일	6일	6일
공사지연 및 연기 요청일수			103일	95일

□ 검토 결과

○ 도급자가 제출한 상기 항목의 소요일수는 적정한 것으로 판단됨

○ 위 사항으로 당초 준공일인 2024년 6월 30일내 전 공정완료 및 준공이 불가한 실정이므로, 공사 지연일수인 95일 내에서 준공기한을 연기하여 잔여공종 완료 및 준공처리에 만전을 기함이 타당함.

□ 준공기한 연기

○ 연기 기간 : 95일

구 분	공 사 기 간	지체상금 부과 여부	귀책사유
당 초	2023. 8. 3. ~ 2024. 6. 30.	미 부 과	도급사 책임 사유 없음
변 경	2023. 8. 3. ~ 2024. 10. 3.

- 상기와 같이 준공기한 연기가 필요하므로 준공기한을 연기하여 공사

추진에 만전을 기하고자 함

□ 행정사항

○ 준공기한 연기 승인 : 서울시설공단에게 통보

○ 행정지원과 준공기한 연기 의뢰

따로붙임 : 1. 준공기한 연기검토 보고서 제출 1부.

2. 준공기한 연기검토 보고 1부.

3. 준공기한 연기원 제출 및 준공기한 연기원 각1부.  끝.