			부구청장 제478호
서울의 중심, 청렴의 중심 종로
		종 로 구
수신	내부결재
(경유)
제목	서울 문묘 및 성균관 대성전 지붕 보수공사 상주감리용역 계약변경 시행

1. 문화유산과-5197(2024.6.12.)호와 관련입니다.

2.「2023년 서울 문묘 및 성균관 대성전 지붕 보수공사 상주감리용역」관련 다음과 같이 계약변경을 시행하고자 합니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명: 2023년 서울 문묘 및 성균관 대성전 지붕 보수공사 상주감리용역

2) 용역기간: 2023. 10. 18. ~ 2024. 6. 13.

3) 계약업체: (주)현창문화재기술단(대표자 박창열)

4) 계약금액: 금170,466,000원(금일억칠천사십육만육천원)

나. 계약변경

1) 변경내용

구 분	당 초	변 경	증 감
계약기간	23.10.18.~24.06.13.	*******************	******
계약금액	170,466,000원	************	**************

2) 사    유: ****************************************

3) 근    거:「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제9장제8절제2호가목

4) 귀책소재: 종로구

5) 지체상금: 미부과

6) 예산과목: 문화유산과, 전통문화유산 보존 및 전승, 문화유산 보존·관리, 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(서울 문묘 및 성균관<대성전·동무·서무·삼문·명륜당> 대성전 보수공사), 시설비및부대비, 감리비

붙임  1. 방침서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

주무관	최금미		문화유산보존팀장	나동호		문화유산과장	서희숙		문화환경국장	임근래
기획경제국장	代차승철		부구청장	06/19
김권기
협조자	주무관	안시성		계약팀장	윤영미		재무과장	代여영환
시행	문화유산과-5485	(	2024. 6. 19.	)	접수		(		)
우	03152	서울 종로구 종로1길 36	/	https://www.jongno.go.kr
전화	02-2148-2052	/전송	02-2148-5818	/	kmei10@seoul.go.kr	/	부분공개(5)