문서번호	재건축재개발과-8546
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	부구청장 제675호

주무관		재개발공공지원팀장	재건축재개발과장		도시관리국장		부구청장
윤석호		최승영	박명대		강종삼		06/19
							김경탁
협 조
						기획경제국장		장병조
						재무과장		이성수
						계약팀장		심은진

	강동을 새롭게, 구민을 신나게!

천호동 214-19 일대 주택재개발사업 정비계획 수립 용역

준공기한 연기 검토보고

2024. 6.

도시관리국

(재건축재개발과)

사전 검토사항

☞ 해당사항에‘■’표시 후 필요 시 괄호 안에 검토내용을 기입하시기 바랍니다.

검 토 항 목		검 토 여 부
법규 검토	관련법규	■ 검토 완료(법규명: 도시 및 주거환경정비법)	□ 해당 없음
	공직선거법	□ 검토 완료	■ 해당 없음
재원확보		□ 국비 ■ 시비 ■ 구비 □ 민자 유치 □ 기타( )	□ 비 예 산
주민의견 반영 및 참여방안		□ 설문조사 □ 공청회 □ 토론회 □ 공모 □ 기타( )	□ 해당 없음
갈등관리		□ 이해관계자 간 갈등 발생 가능 □ 민원발생 가능 (갈등요소: )	■ 해당 없음
전문가 자문		□ 이행 완료 □ 예정 (이행방안: 워크숍, 자문위원회 등)	■ 해당 없음
협업 협치	타 기관 및 단체	□ 중앙부처 □ 서울시 □ 타 지자체 □ 투자출연기관 □ 민간단체 □ 구의원 업무공유 □ 기타( )	■ 해당 없음
	관 련 부 서	■ 협업 필요(해당부서: 재무과 )	□ 해당 없음
추진절차		□ 일상감사 □ 투자심사 □ 용역심사 □ 민간투자사업 심의 □ 타당성 검토 □ 공유재산 심의 □ 의회 심의 □ 기타 위원회 심의 등	■ 해당 없음
홍보방안		□ 보도자료 제공 □ 기자 설명회 □ 구 소식지 □ SNS □ 기타( )	■ 해당 없음
기타 고려사항		□ 인권영향평가(구민 인권보장 및 증진) □ 아동친화 및 아동영향평가 □ 교육영향평가(학생 안전과 수업권 확보) □ 여성친화 및 성별영향 □ 건강친화요소 □ 환경인지 □ 사회적 약자 배려 □ 타 기관 사례 파악 비교 □ 안전대책 □ 유지관리비용 □ 시장조사 □ 미래행정 수요예측 □ 고용효과 □ 행사의전 □ 바른 우리말(행정순화어)

천호동 214-19 일대 주택재개발사업 정비계획 수립 용역

준공기한 연기 검토보고

천호동 214-19 일대 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역의 준공기한 연기 사유가 발생하여 다음과 같이 계약사항을 변경하고자 함.

1		추진개요

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명: 천호동 214-19 일대 주택정비형 재개발사업 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역

ㅇ 대상구역: 강동구 천호동 214-19 일대(구역면적: 28,058.2㎡)

**********************************

*******************************

*****************************

□ 진행경과

ㅇ 2022.11.19.   신속통합기획 신청(강동구→서울시)

ㅇ 2022.12.16.   정비계획 수립 용역계약 및 착수

**************************************************

ㅇ 2023.11.09.   신속통합기획 주민 간담회[신속통합기획(안) 설명]

*******************************

***********************************************

*************************************************

ㅇ 2023.12.27.   신속통합기획 주민 설명회[신속통합기획(안) 설명]

ㅇ 2024.01.08.   신속통합기획 확정 통보(서울시→서울시)

******************************

ㅇ 2024.04.12.   정비구역지정 및 정비계획(안) 협의

※ 2024. 6. ~ 7. 주민공람, 주민설명회 완료 예정

2		계약사항 변경

□ *******************

****************

****************************************

*************************************************

**************************

**************************************

*******************************************************

【사업구역 변경】

	→
*********		*****************

******

************

*************

****************************************************************************

3		향후계획

ㅇ '24.06.26. ~ 07.31.  정비계획(안) 주민공람

ㅇ '24.06.27.  주민설명회 실시

*********************************

*******************************************

************************************

*************************************

*******************

붙임  1. 설계변경 요청(용역수행자 제출) 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 구역경계 변경 관련 공문 각 1부.

4. 계약의뢰 지연사유서 1부.  끝.