문서번호	기전과-8132
결재일자	2024. 6. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
임현규		06/20
		차경호
협조
	주무관		구영빈

원인자부담공사 준공승인 검토 보고  「올림픽스포츠콤플렉스 조성공사 중 교통안전시설물(신호,표지)」

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

「올림픽스포츠콤플렉스 조성공사 중 교통안전시설물(신호,표지)」

2024. 6. 19.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

올림픽스포츠콤플렉스 조성공사 중 교통안전시설물(신호,표지)관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 공사 승인

ㅇ 동부도로사업소 기전과-1078호(2024.1.23.) 신호

ㅇ 동부도로사업소 기전과-1077호(2024.1.23.) 표지

□ 원인자부담공사 준공승인 요청

******************************

******************************

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 올림픽스포츠콤플렉스 조성공사 중 교통안전시설물(신호,표지)

□ 공사위치 : 송파구 신천동 26번지 일대

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
***	*****	*******	******	*****
**	*****	*******	*******	*****

Ⅲ		추진 경위

□ '23.12.22. : 원인자부담공사 승인 요청

□ '24.01.23. : 공사 승인

□ '24.03.07. : 원인자부담공사 변경 승인 요청

- 동절기 공사로 인해 공사기간 변경 요청

□ '24.03.27. : 원인자부담공사 변경 승인

- 공사기간: 승인일 ~ 2024.01.31.  → 승인일 ~ 2024.03.31.

□ '24.03.28. : 원인자부담공사 준공승인 요청

□ '24.05.02. : 예비준공검사 시행

□ '24.06.13. : 준공검사 시행

Ⅳ		준공검사 결과

□ 검사결과

ㅇ 점검일시 : 2024.06.13.(목) 10:00 ~

ㅇ 입 회 자 : ***********************************************

ㅇ 지적사항 : 표지부착 미흡

□ 조치결과

ㅇ 확인일시 : 2024.06.17.(월) 10:00 ~

ㅇ 확 인 자 : ***************

ㅇ 확인결과 : 지적사항 조치완료(붙임 2,3)

□ 준공승인 검토사항

구 분	검 토 사 항	결 과	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적 정
	교통안전시설 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적 정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적 정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적 정
	차량 및 보행등 정상 작동 상태 확인	적 정
	차량 및 보행등 지주 설치(수평) 상태 확인	적 정

Ⅴ		검토 의견

□ 준공검사 시행 후 준공서류를 검토한 결과 적정하므로 준공 승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 제출 서류 각 1부.

2. 준공검사 결과보고 각 1부.

3. 올림픽공원(준공지적사항)-조치보고 각 1부.   끝.