문서번호	기전과-7751
결재일자	2024. 6. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
곽영두		代김진종	06/20
			손경철
협 조

- 월드컵지하차도 외 1개소 진입차단시설 설치공사 - 준공 결과 보고

- 월드컵지하차도 외 1개소 진입차단시설 설치공사 -

준공 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 6.

서부도로사업소

(기  전  과)

- 월드컵지하차도 외 1개소 진입차단시설 설치공사 -

준공 결과 보고

서부도로사업소장: 손경철☎8300 기전과장 : 최경주☎8390 담당 : 곽영두☎8328

월드컵지하차도 외 1개소 진입차단시설 설치공사가 준공되어 준공검사를 시행하고 이를 아래와 같이 보고함

□ 공사 개요

ㅇ 공 사 명: 월드컵지하차도 외 1개소 진입차단시설 설치공사

********************************

************************

ㅇ 계약기간: 2024.3.22. ~ 2024.6.14.

ㅇ 준 공 일: 2024.6.11.

ㅇ 사업내용

- 월드컵지하차도 문주형 차단막 진입차단시설 2개소 제작 및 설치

- 서빙고지하차도 편주형 차단막 진입차단시설 2개소 제작 및 설치

ㅇ 추진경위

- 2024. 4. 24. : 구조물 제작 관련 공장 검수 완료

- 2024. 5.  8. : 월드컵지하차도 문주형 구조물 설치 완료

- 2024. 5. 14. : 서빙고지하차도 편주형 구조물 설치 완료

- 2024. 5. 16. : 현장 테스트 완료

- 2024. 6. 4. : 준공 설계변경 시행 및 변경계약 완료

- 2024. 6. 11. : 공사 준공

ㅇ 설치사진

월드컵지하차도 문주형 차단시설	서빙고지하차도 편주형 차단시설

□ 준공검사 개요

ㅇ 준공일: 2024.6.11.(화)
ㅇ 검사일: 2024.6.14.(금)

ㅇ 검사자: 전기7 강준석, 전기7 곽영두

ㅇ 검사내역

- 월드컵지하차도 및 서빙고지하차도 진입차단시설 구조물 설치 적정 여부
- 진입차단시설 차단막 상태 및 작동 여부

- 제어함체 등 부속장비 설치 적정 여부

월드컵지하차도 작동 확인	서빙고지하차도 작동 확인

□ 행정사항

ㅇ 준공검사조서 작성 및 제출(관리단속과)

ㅇ 재난관리기금 집행승인 요청

붙임  1. 준공계 1부.(용량 초과로 전체 문서는 별첨)
2. 준공사진 1부.  끝.