문서번호	설비부-10641
결재일자	2024. 6. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
전희선		곽용길	06/20
			신용휴
협조

「신림공영차고지(저류조포함) 건설 통신공사」

실정보고(저류조 임시 CCTV 및 방송) 검토보고

2024.  6.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「신림공영차고지(저류조포함) 건설 통신공사」

실정보고(저류조 임시 CCTV 및 방송) 검토보고

설비부장 : 신용휴☎6438-2308 도로설비과장 : 곽용길☎2340 담당 : 전희선☎2345

「신림공영차고지(저류조포함) 건설 통신공사」와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 실정보고(지하 2층 저류조 임시 CCTV 및 방송설비) 사항에 대해 검토하고 결과를 보고 드림

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 제6절(공사설계의 변경)

ㅇ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)

ㅇ 실정보고(저류조 임시 CCTV 및 방송 설비)[신림차고지(감)제2024-211호(2024.6.18.)]

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 신림공영차고지(저류조포함) 건설 통신공사

ㅇ 위    치 : 서울시 관악구 신림동 140-2일대

ㅇ 규    모 : 버스 주차장 및 빗물저류조 조성

- 설비규모 : 지상 및 지하1층 주차면 101대, 지하2층 저류조 V=35,000㎥

ㅇ 건설사업관리단 : **********

ㅇ 계약현황

구분	계약업체	차수	계약금액	계약기간	비고
통신	********	**	************	*********************
		**	************	*********************

□ 검토내용

ㅇ 변경사유 : *********************************

ㅇ 변경내용

*********************************************

***************************************

******************************************

****************************

구분	품명	규격	단위	수량		증, 감	비고
				당초	변경
****** ****	***********
	***	*************	**	*	**	****
	************	*****************************	**	*	**	****
	*******	**********************	**	*	**	****
	********	****	**	*	**	****
	***	********	**	*	**	****
	****	*******	**	*	***	*****
	*******	*******	**	*	***	*****
	*****	*********	**	*	**	****
	*****	*********	**	*	**	****
	*****	****	**	*	**	****
	***	******	*	*	***	*****
	***********
	****	*********	*	*	****	*****
	*****	*************	*	*	****	*****
	****************	****	*	*	******	*******
	*****************	****	*	*	******	*******
	***	****************	**	*	***	****

**********************

구분	품명	규격	단위	수량		증, 감	비고
				당초	변경
**** **	***********
	***************	************	*	*	*****	******
	*****	*********	*	*	*****	******
	*******	*********	**	*	*****	******
	***	***********	**	*	***	****
	*****	*	*	*	***	****
	***	************	*	*	***	****
	***	***	*	*	***	****
	***********
	***************	************	*	*	**	*****
	***	***	*	*	*	****

※ 기존품목은 기존 계약단가 적용, 신규품목은 시중단가(최저가)에 낙찰률 적용

ㅇ 관련 도면 및 위치도

******************************************

******************************************************************************

ㅇ 개략공사비 증감 : *************

구분	개략 공사비(단위 : 원)			비고
	당초	변경	합계(증, 감)
재료비	*	**********	************	******
노무비	*	**********	************
경비	*	*********	************
(소계)	*	**********	*************
간접비, 부가가치세	*	**********	************
(총계)	*	**********	************

□ 검토의견

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

**************************************************************************************************************************************

**********************************************************************

***************************************

ㅇ 보고자 검토의견

***********************************************************

붙임  건설사업관리단 실정보고 1부.  끝.