문서번호	정수시설과-6675
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박성택		代전준원	06/19
			代김성수
협 조
	주무관			박소현

「2024년 영등포아리수정수센터 조경관리용역」

용역 설계변경(1회) 검토 보고

2024. 6.

영등포아리수정수센터

[정수시설과]

설계변경(1회) 검토보고

우리 센터 2024년 조경관리용역 시행중 신규공종 및 물량증감 사항이 발생하여 설계변경을 시행하고자 보고드림

용역현황

용 역 명 : 2024년 조경관리용역(영등포아리수정수센터)

용역기간 : 2024. 4. 8. ~ 12. 31.

계약금액 : 147,664천원

도 급 자 : 남우산업개발㈜ 대표 김활현

변경내용 : 붙임“설계내역서”참조

설계변경 관련근거

- 지방자치단체 공사계약일반조건 제4장(행정안전부예규 제253호)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장8절, 13장6절(행정안전부예규 제34호)

설계변경 사항

시공물량 증․감 및 신규공종 발생에 따른 설계변경

- 물량증감

․ 잔디깍기 외 6공종

- 신규공종

․ (홍보관 상부 화단) 관목(수국) 식재(H0.3미만)

․ (본관 앞 화단) 초화류 사급자재 식재 등

건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 납부내역 정산

- 금회 설계 변경시는 제외하고, 추후 최종 설계변경시 계약업체 납부내역 확인후 정산

사업비 증감 내역

연번	공 종	금 액 (천원)			비고
		당 초	변 경	증·감
1	총용역비	148,879	148,879	-
2	도 급 비	147,664	148,879	증 1,215
3	관 급 비	1,215	-	감 1,215

조치계획

변경된 설계내용에 따라 건설공사 설계변경 심의 및 기성준공 처리절차 운영계획에 의거 설계변경 심의위원회를 개최하여 처리하고자 합니다.

붙임  설계변경 내역서 1부.  끝.