문서번호	치수과-4611
결재일자	2024. 6. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		김창신	06/20
			이유국
협 조

- 2023년 한강 취수장 주변 준설공사 -

설계변경(2회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 6.

미래한강본부

(시설부)

- 2023년 한강 취수장 주변 준설공사 -

설계변경(2회) 검토보고

「2023년 한강 취수장 주변 준설공사」관련 건설사업관리자 설계변경(2회) 요청에 따른 조치 계획을 검토하여 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 한강 취수장 주변 준설공사

ㅇ 위    치 : 한강 잠실수중보 상류(취수장 주변)

ㅇ 공사기간 : '23. 8. 21. ~ '24. 6. 30.

ㅇ 공사규모 : 준설 및 반출 38,990㎥

- 자양 1,300㎥, 일산 500㎥, 풍납 22,660㎥, 성남 14,200㎥, 강북 330㎥

ㅇ 계약금액 : 1,578,602천원

ㅇ 시 공 사 : 유호산업개발(주) 대표 유정환

ㅇ 감 리 사 : ㈜이준엔지니어링 외 1개사 대표 김정대

□ 설계변경 개요

ㅇ 사  유 : 본부 준설토 재사용 공사장 공기 지연에 따른 사토장 변경

ㅇ 관련문서

- 설계변경(2회) 요청서 (이준한강2024-26호, 2024.6.11.)

- 설계변경 심의결과 통보 (시설관리과-4894호, 2024.6.21.)

*********************************************************

ㅇ 수량 증·감 현황

구 분	운반거리(km)	수량(㎥)		증·감		비 고
		당초	변경
암사초록길 조성 현장	5.19	10,000	-	감)	10,000	기반시설과
당인리 한강 연결로 현장	22.41	-	2,782	증)	2,782	시설관리과
서래섬 현장	16.12	-	291	증)	291	시설관리과
강원도 춘천시 근화동 786-55	87.70	-	3,927	증)	3,927	민간사토장
양평군 덕평리 393	43.55	-	3,000	증)	3,000	민간사토장

ㅇ 공사비 증·감 현황

구 분	당 초	변 경	증·감		비 고
*******	***********	***********		*
*********	***********	***********	**	***********
*******	***********	***********		*
*******	***********	***********	**	**********
*******	*************	*************	**	***********
*****	***********	***********	**	**********
***	*************	*************	**	***********

□ 조치계획

ㅇ 설계변경 자문의견 및 설계변경 규정에 따라 설계변경(2회) 시행

- 설계변경 시행 및 변경계약 요청(치수과→총무과)

ㅇ 설계변경 승인 통보(치수과→건설사업관리단)

붙임 : 1. 변경 내역서 1부

2. 계약금액조정 검증확인서 1부

3. 설계변경 자문 심의결과 1부

4. 건설사업관리단 검토의견서 1부

5. 관련 보고서 1부.  끝.