문서번호	정수시설과-6684
결재일자	2024. 6. 19.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장
박성택	06/19
	代전준원
협 조

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

〔2024년 조경관리용역〕

2024. 6.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

우리센터【2024년 조경관리용역】시행중 신규공종 및 물량증감 사항이 발생하여 자체 심의위원회를 개최하고 심의의결 결과를 보고함

용역현황

용 역 명 : 2024년 영등포아리수정수센터 조경관리용역

용역기간 : 2024. 4. 8. ～ 12. 31.

사 업 비 : 148,879천원

- 도급비 147,664천원, 관급비 1,215천원

도 급 자 : 남우산업개발㈜ 대표 김활현

심의위원회 심의 내용

신규공종 발생 및 시공물량 증,감에 대한 적정성 검토

제경비 비율 반영에 대한 정산여부 검토

기타 설계변경 관련 적정성 검토

심의위원회 심의결과

위 원 장 : 정수시설과장 김영준(代 전준원)

위    원 : 시설6급 정연준 외 3명, 간사 1명

일    시 : 2024. 6 19.(수) 15:00 ~ 15:30 (소회의실)

안    건 : 2024년 영등포아리수정수센터 조경관리용역 설계변경 적정성 여부 및 내역 검토

심의결과 : 적정함

설계변경 금액

연번	공 종	금 액 (천원)			비고
		당 초	변 경	증·감
1	총용역비	148,879	148,879	-
2	도 급 비	147,664	148,879	증 1,215
3	관 급 비	1,215	-	감 1,215

조치계획

위와 같이 신규공종 및 시공물량 증감으로 인한 설계변경 사항을 자체 심의위원회 심의결과에 따라 설계변경을 시행하고자 합니다.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 심의위원회 결과 1부.  꿑,