문서번호	시설관리과-10254
결재일자	2024. 6. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
박민용	김용섭	전결 06/20
		권승계
협 조

설계변경(2차) 및 차수변경 심의위원회 개최결과 보고 [2023년 은평구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사]

서부수도사업소

1. 공 사 현 황

가. 공 사 명 : 2023년 은평구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

나. 공사기간 : 2023. 6. 20. ~ 2024. 6. 30.

다. 총도급비 : *******************************

라. 공사개요

- 노후밸브 및 밸브실 정비: 당초 93개소 ⇒ 변경 95개소

마. 도 급 자 : **************

2. 보 고 내 용

가. 설계변경 사유

- 신규 공종 발생 : 낙석방지망설치 외 94건

- 물량 증감 발생 : 터파기(기계100%) 302㎥ 외 469개 공종

나. 공사비 변경내용

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 감
계(총부기금액)	794,138,800	792,968,000	감)1,170,800
1차수(2023년)	522,918,000	522,918,000	증감없음
2차수(2024년)	271,220,800	270,050,000	감)1,170,800

3. 조 치 의 견

위와 같이 시공물량 증․감 등으로 인한 설계 변경된 사항를 자체 심의한 결과에 따라 계약상대자와 합의한 후 설계변경을 시행하고 행정지원과에 변경 계약 의뢰하고자 합니다.

붙임  1. 설계변경심의위원회 개최 1부.

2. 설계변경요약서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 설계변경 심의결과서 1부.  끝.