아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(1회) - 2024년 조경관리용역

우리센터에서 시행중인『2024년 영등포아리수정수센터 조경관리용역)』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

1. 용 역 명 : 2024년 영등포아리수정수센터 조경관리용역

2. 도 급 자 : 남우산업개발㈜ 대표 김활현

3. 용역기간 : 2024. 4. 8.~ 12. 31.

4. 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수생산, 맛있는 아리수 생산기반구축, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(정수비) ※ 중대재해 예산분류 : 해당없음

5. 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 물량 증․감에 따른 설계변경

6. 설계변경금액 내역                                                       (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
총공사비	148,879,000	148,879,000	-
도 급 비	147,664,000	148,879,000	증 1,215,000
관 급 비	1,215,000	-	감 1,215,000

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 심의 결과보고 및 심의의견서 각 1부.

3. 설계변경 내역서(1회) 1부

4. 변경합의서 1부.  끝.

주무관	박성택		정수시설과장	代전준원		주무관	박소현		영등포아리수정수센터소장	06/20
전종원
협조자
시행	정수시설과-6704	(	2024. 6. 20.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5681	/전송	02-3146-5604	/	201401235@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)