2024년 월드컵공원 임목폐기물 처리용역 작업 지시(제2차-기간연장)

문서번호	환경녹지과-2949
결재일자	2024. 6. 20.

결재	주무관	환경관리팀장	환경녹지과장
	정동열	윤희권	전결 06/20
			강병기

2024년 월드컵공원 임목폐기물 처리용역 시행과 관련하여 환경녹지과-2843호(2024.6.17.)로 2차 작업지시를 하였으나, 처리대상 임목폐기물량에 비하여 1일 투입되는 차량이 한정되어 작업(처리)기간을 연장하고자 합니다.

❍ 지시번호 : 2024 - 제2차(기간연장)

❍ 용 역 명 : 2024년 월드컵공원 임목폐기물 처리용역

❍ 작업기간

- 당초 : 2024. 06. 17. ~ 06. 19.

- 변경 : 2024. 06. 17. ~ 06. 28.

**************************************************************

❍ 작업지시 내역

지시번호	공 종	위 치	폐기물 현황	비고
제2차	임목폐기물운반·처리	마포구 상암동 481-72 일대	공원내 수목 전지·전정 부산물 등

❍ 위치도 및 현황사진

위 치 도

현장사진

끝.