문서번호	시설관리과-10032
결재일자	2024. 6. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
류두관		김성호	06/21
			이규현
협조

설계변경 심의위원회 개최(2023년 수유동 외 5개동 상수도공사-2차,최종)

『'2023년 수유동 외 5개동 상수도공사(장기계속단가계약)-2차,최종』

설계변경 심의 위원회 개최

2024.  6. 21. (금)

북부수도사업소

(시설관리과)

『2023년 수유동 외 5개동 상수도공사(장기계속단가계약)-2차,최종』

설계변경 심의위원회 개최

『2023년 수유동 외 5개동 상수도공사』의 신규 공종 및 공사물량의 증·감이 발생하여 설계변경 심의위원회를 개최코자함.

□ 공사 현황

ㅇ 공 사 명 : 2023년 수유동 외 5개동 상수도공사(장기계속단가계약)-2차,최종

ㅇ 공사개요

- 당  초 : 상수도관 부설 D=15~300mm, L=996m

- 변  경 : 상수도관 부설 D=15~300mm, L=350m

ㅇ 공사기간 : 2024.1.1.~2024.6.30.(총부기기간 : 2023.06.22.~ 2024.06.30.)

ㅇ 계약금액

- 당  초 :**********************************

- 변  경 :******************************

ㅇ 계약상대자 : ****************

□ 심의회 개최

ㅇ 심의일정 : 2024. 6. 21.(금) 15:00

ㅇ 심의장소 : 북부수도사업소 시설관리과

ㅇ 심사위원

- 위원장 : *********

- 간  사 : *********

- 위  원 : *******************************

□ 심의 내용

ㅇ 신규공종에 따른 설계변경 적정여부

- 수량변동 및 단가적용의 적정성 여부

- 계약 변동(증.감) 수량의 단가 낙찰률 적용 적성여부 등

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

□ 설계 변경 내역

ㅇ 시공물량 증·감에 따른 변경

- 공사 중 물량 증감 : ***************************

- 신규공종 : *************************

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증·감(원)	기 간
도 급 비	***********	***********	**************
1차수 금액	***********	***********	*
2차수 금액	***********	***********	**************

□ 행정 사항

ㅇ 설계변경내역에 대하여 적정·적법성 여부를 검토 및 심의하고, 심의결과에 의거하여 설계변경에 반영코자함.

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 심의 신청서 1부.

3. 변경내역서 1부.  끝.