문서번호	설비부-10669
결재일자	2024. 6. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비설계과장	설비부장
임형진		조기성	06/20
			신용휴
협조

물가변동에 따른 계약금액 조정(2회) 검토보고(서울시 문화유산보존센터 건립 통신공사)

『서울시 문화유산보존센터 건립 통신공사』

물가변동에 따른 계약금액 조정(2회) 검토보고

2024. 6.

도시기반시설본부

(설비부)

『서울시 문화유산보존센터 건립 통신공사』

물가변동에 따른 계약금액 조정(2회) 검토보고

『서울시 문화유산보존센터 건립 통신공사』와 관련하여 물가변동에 의한 계약금액 조정(2회) 요청이 있어 물가변동 적정 여부를 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

ㅇ 지방계약법 제22조(물가변동 등에 따른 계약금액의 조정)

ㅇ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행 지침

(국토교통부 고시 제2020-987호, 2020.12.16. 물가변동으로 인한 계약금액 조정)

ㅇ 건설사업관리단 (주)무영씨엠건축사사무소 제24-221호(2024. 6.17.)

- 계약금액 조정(2회) 검토보고(서울시 문화유산보존센터 건립 통신공사)

Ⅱ		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 서울시 문화유산보존센터 건립 통신공사

ㅇ 공사위치 : 강원도 횡성군 우천면 두곡리 550번지 일원

ㅇ 공사규모 : 지상2층, 연면적 9,255㎡

ㅇ 감 리 단 : *************

<계 약 현 황>

구 분	차 수	계약금액	계약기간	계약업체
***	***	***********	*************************	*********
	***	***********	*************************

Ⅲ		검토내용

ㅇ 물가변동(2회)으로 인한 계약금액 조정 충족 요건

- 계약을 체결한 날(직전 조정기준일)부터 90일 이상 경과

- 입찰일(직전 조정기준일)을 기준으로 지수조정률이 100분의 3이상 증감된 경우

ㅇ 물가변동(ESC) 조정 충족 여부

구 분	제2회	충족여부	비 고
조 정 방 법	****	***	******
기 준 시 점 (직전조정기준일)	***********	***	******
비 교 시 점 (조정기준일)	***********
경 과 일 수	****
지수 조정률	*****	***	*****

ㅇ 계약금액 조정(2회) 세부내용 검토

구 분		충족여부	비 고
물가변동 대상금액의 계약금액(A)		************	*****
물가변동 적용제외 금액(B)		************	****
물가변동 조정기준일 현재공정률	예정공정률	*****	**** ********************************
	실행공정률	*****
	기성공정률	*****
물가변동 적용대가(C)		************	***********
물가변동 조정률(D)		*****	********
물가변동 등락대상 조정금액(E)		***********	***********
선급금 공제금액(F)		*	****
물가변동 조정 적용금액(G)		***********	**********

ㅇ 계약금액 조정(2회)

				(단위 : 원)
구 분	계약금액	물가변동 금액(1회)			물가변동 금액(2회)	계약금액 조정	비 고
***	***********	**********			**********	***********
***	***********	**********			**********	***********

ㅇ 물가변동 조정금액 현황

					(단위 : 원)
구 분	기준시점	비교시점		경과기간		조정률	물가변동 금액	비고
****	***********	***********		****		*****	**********
****	***********	***********		****		*****	**********
*							**********

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- 물가변동으로 인한 계약금액 조정내역을 검토한 결과, 물가변동 기간이 ******************************************

- *******************로 관련규정에 의거 물가변동 조정금액이 적정하게 산출된 것으로 판단됨.

Ⅳ		보고자의견

ㅇ 물가변동으로 인한 계약금액 조정(2회)에 대한 건설사업관리단의 검토보고는 적정하다 판단되어 계약금액 조정을 승인하고, 변경계약 시 반영될 수 있도록 조치하고자 함.

붙 임 : 감리단 물가변동으로 인한 계약금액 조정(2회) 검토보고 1부.  끝.