현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
		성 북 구
수신자		내부결재
(경유)
제목	장월로 보행환경 개선공사 설계변경(1회, 정산)

우리 부서에서 시행 중인 「장월로 보행환경 개선공사」에 대하여 다음과 같이 설계변경(1회, 정산)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 장월로 보행환경 개선공사

2. 공사기간 : 2024. 3. ~ 2024. 6.

3. 계약금액 : 금356,391,900원(금삼억오천육백삼십구만일천구백원)

4. 계약상대자 : ****************

5. 설계변경 사유

- 신규공종 추가 및 시공 물량 증·감 발생

6. 설계변경 금액

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감		비 고
총사업비	652,678,900	690,058,000	증	37,379,100
도 급 비	356,391,900	534,610,000	증	178,218,100
관 급 비	133,052,000	135,288,000	증	2,236,000
이 전 비	163,235,000	20,160,000	감	143,075,000

7. 예산과목

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리, 도로시설물 유지보수공사, 시설비및부대비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부

3. 설계변경 검토보고서 1부.

4. 일상감사 의견서 1부.  끝.

주무관	이재용		도로시설담당	이태기		도로과장	송승익		건설교통국장	06/21
代장기성
협조자	계약담당	조은숙		재무과장	우경죽
시행	도로과-11210	(	2024. 6. 21.	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3566	/전송	02-2241-6557	/	ljy981202@sb.go.kr	/	부분공개(5)