등록번호

푸른도시과-12366

주무관

자연생태팀장

푸른도시과장

안전건설국장

등록일자

노대산

차우열

김종철

전결 06/21

결재일자

2024. 6. 21.

공개구분

부분공개(5)

황원근

협  조

- 산불취약지 산불소화시설 설치공사 -

준공기한 연기 검토 보고

안전건설국

(푸른도시과)

- 산불취약지 산불소화시설 설치공사 -

준공기한 연기 검토 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

「산불취약지 산불소화시설 설치공사」 추진과 관련하여 아래와 같이 공사 준공    기한을 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

1. 공사개요

○ 공 사 명: 산불취약지 산불소화시설 설치공사

○ 위    치: 홍제동 산1-1 일대

○ 공사내용: 물탱크 설치 등

○ 계약금액: **************************

○ 도 급 자: ********************

2. 변경내용

○ 공사기간 변경

- 당초:  2023. 12. 15. ~ 2024. 6. 30.

- 변경:  2023. 12. 15. ~ 2024. 7. 31.

3. 연기사유 및 보고자 의견

○ 공사 기간중 혹서기로 인한 산지 내 인력 운반 작업 지연과 우천 등 기상상황으로 인하여 절대 공기가 부족하기에 공사기간을 연장하여 공사 추진에 철저를 기하고자 함

4. 연기귀책: 서대문구청장

5. 지체상금 부과여부: 미부과

붙임  준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.