문서번호	토목부-12681
결재일자	2024. 6. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
정성오		代배원영	06/25
			이임섭
협조
	주무관		안동주

「잠실대교 남단IC 연결체계 개선공사」

사토장 변경(3차) 검토보고

2024.  6.

도시기반시설본부

(토   목   부)

「잠실대교 남단IC 연결체계 개선공사」

사토장 변경(3차) 검토보고

기존 사토장 토사반입이 완료되어 발생토사 반입가능한 추가 사토장선정을 위한 실정보고 임

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 잠실대교 남단IC 연결체계 개선공사

ㅇ 규    모 : 연결로 연장(L)=3.33㎞(1차로)

- 교 량 : 33m/1개소, 지하차도 300m/1개소(BOX 171m, U-type 129m)

ㅇ 공사기간 : ***********************************************

ㅇ 도 급 비 : ***********************************

ㅇ 시 공 사 : 삼환기업(주) 외 1개사

ㅇ 감 리 단 : ㈜동해종합기술공사 외 2개사

□ 보고내용

ㅇ 기존 사토장 토사 반입완료에 따른 추가 사토장 선정 필요

- 기존 사토장 토사반입이 완료되어 Ramp-B․D 추진과정에서 발생하는 토사에 대하여 사토장 추가 선정이 필요함

- 발생토 현황

공사위치	공종	규격	설계량	반출현황(㎥)		잔여량 (㎥)	비고
				기반출량(1․2차)	금회반출량(3차)
*********** *********	**	**	*******	*******	*******	*******

□ 검토내용

ㅇ 발생토 토질조건으로 반입이 가능한 사토장 선정

- 기존 사토장에서 토사반입이 완료되어 당 현장의 발생토 토질조건으로 반입이 가능한 추가 사토장 선정 필요

· 반입가능 사토장을 '발생토사 사용처 조회', ‘인근 공사장’ 및 '토석정보공유시스템'으로 조사결과 반출가능(반입시기 및 토질상태) 현장이 없음

- 금회 사토장으로 선정된 농지 성토 현장(포천시 소홀읍)은 민간사토장 중 최단거리이고 개발행위허가를 득하여 즉시 토사반입이 가능함

	< 현 황 도 >
사토장 전경		사토장 전경

※ 잔여 사토량에 대하여는 추후 선정 예정(인근 공사장 협의 및 토석정보공유시스템 활용)

ㅇ 사토장 변경 현황                                         (단위 : 원)

구 분	사토장 위치	단 가		단가적용 기준
		당 초	변 경
***	*************************	*****	*	*
***************	*************************	*	******
*******	**************************	*	******	******** *******

※ 대체 운반로에 대한 품셈단가와 표준시장단가 중 작은값 적용

ㅇ 공사비 검토

- 공사비 증․감 현황

구 분	수 량(㎥)		금 액(천원)			비고
	당 초	변 경	당 초	변 경	증·감
*************	*****	*	******	*	*******
*************	******	******	*******	*******	********
*************	*	******	*	*******	*******
*****			*******	*******	******
*******			******	******	*****
****			******	******	******
****			*******	*******	******
*****			******	******	*****
*****			*******	*******	*******

- 신규단가 협의

․ 협 의 일 : **************

․ 참 석 자 : *************************************

․ 협의결과 : 계약 일반조건 “제7절 1-가-2)” 계약상대자의 책임없는 사유에
해당되어 협의율 적용

시공사(안)	발주처(안)	감리단(안)	적용	비고
********	***********	***********	***********	**************

□ 조치계획

ㅇ 현장 내 발생토사의 유용이 불가하여 적기에 반출하기 위한 사토장 변경은 적정한 것으로 판단되며

- 사토운반에 반영된 통행료는 설계변경 및 기성 시에 증빙자료 제출

ㅇ 원활한 공정추진을 위하여 실정보고를 승인하고 추후 설계변경 시 반영하고자 함.

붙 임 : 실정보고서 1부.  끝.