아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	내부결재
(경유)
제목	선금 정산[광암수계 배수관로 정비공사(1공구) - 기성5회차]

1. 시설건설과-6122(2024. 6. 20.)호 관련 내용입니다.

2. "광암수계 배수관로 정비공사(1공구)" 건에 대한 금회 기성 청구액에서 아래와 같이 선금을 정산하고자 합니다.

가.

계 약 건 명

:

광암수계 배수관로 정비공사(1공구) - 1차수

나.

계 약 상 대

:

계룡건설산업 주식회사*************

다.

계 약 금 액

:

금17,705,000,000원(금일백칠십칠억오백만원)

라.

계 약 일 자

:

2022. 2. 28.

마.

공 사 기 간

:

2022. 3. 21. ∼ 2024. 9. 25.

바.

선금 지급액

:

금3,500,000,000원(금삼십오억원)(선금 2회차)

사.

금회기성금액

:

금1,621,000,000원(금일십육억이천일백만원)

아.

선금 정산액

:

금975,307,450원(금구억칠천오백삼십만칠천사백오십원)

자.

선금 정산 내역

계약금액(A)	선금지급액(B)	금회기성금액(C)	선금정산액(D)	차액(E=C-D)
금17,705,000,000원	금3,500,000,000원	금1,621,000,000원	금975,307,450원	금645,692,550원

※ 1회 선금액(1,100,000,000원)은 기정산 완료

※ 선금정산식 = 선금지급액(B)×금회기성금액(C)÷계약금액(A)

※ 선금정산액(D) = 선금정산식에서 산출한 선금정산액(320,446,200원) 이상으로 산정

차.

금회 지급액

:

금525,165,550원(금오억이천오백일십육만오천오백오십원)

※ 금회지급액 = 차액(E)-금회기지출노무비액(120,527,000원)

카.

지급 누계액

:

금8,428,679,980원(금팔십사억이천팔백육십칠만구천구백팔십원)

※ 산출 = 선금1회금액(1,100,000,000원) + 선금지급액(B) + 기지급노무비(341,247,500원)+

기기성금액(2,962,266,930원) + 금회지급액(525,165,550원)

붙임 1. 기성금청구의뢰공문 1부.

2. 계약진행상황 1부.  끝.

주무관	최승영		재무회계과장	공미순		요금관리부장	06/25
김분숙
협조자	주무관	오장록
시행	재무회계과-8003	(	2024. 6. 25.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동) 상수도사업본부 요금관리부 재무회계과 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1234	/전송	02-3146-1209	/	plato@seoul.go.kr	/	부분공개(7)