문서번호	치수과-4741
결재일자	2024. 6. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		김창신	06/25
			이유국
협 조

- 2023년 한강 저수로 준설공사 -

설계변경(총차3회, 2차2회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 6.

미래한강본부

(시설부)

- 2023년 한강 저수로 준설공사 -

설계변경(총차3회, 2차2회) 검토보고

「2023년 한강 저수로 준설공사」관련 건설사업관리자 설계변경(총차3회, 2차2회) 요청에 따른 조치 계획을 검토하여 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 한강 저수로 준설공사(장기계속)

ㅇ 위    치 : 한강 잠실수중보 ~ 신곡수중보

ㅇ 공사기간 : '23. 8. 21. ~ '24. 6. 30.

ㅇ 공사규모 : 준설 14,000㎥, 반출 140,350톤

************************************

***************************

********************************

□ 관련문서

ㅇ 2023년 한강 저수로 준설공사(총차3회, 2차2회) 변경 설계서 제출

(이준한강2024-28호, 2024.6.19.)

ㅇ 실정보고서

- 옥수 선착장 주변 준설(치수과-2935호, 2024.4.12)

- 잠실 선착장 주변 준설(치수과-3507호, 2024.5.8)

□ 변경사유

ㅇ 수상교통 활성화를 위한 옥수, 잠실 선착장 조성 지역 준설시행

- 준설량 : 11,080㎥(옥수 7,500㎥, 잠실 3,580㎥)

********************************************

ㅇ 기타 현장여건에 변동에 따른 물량 증·감 사항 반영 등

□ 주요 공종 수량 변경 현황

공 종	규 격	단위	변 경 현 황
			당 초	변 경	증·감
준설공	잠원선착장, L=24.85km	㎥	4,700	4,700	-
	뚝섬선착장, L=27.76km	㎥	9,300	8,500	감)	800
	옥수선착장, L=24.85km	㎥	-	7,500	증)	4,700
	잠실선착장, L=30.65km	㎥	-	3,580	증)	9,300
사토운반	L=53.8km, D/T 24톤	톤	42,105	42,105	-
	L=66.4km, D/T 24톤	톤	28,070	32,722	증)	4,652

※ 예산절감을 위해 준설토 약 7,600㎥은 임시야적장 주변 복토재로 재사용

ㅇ 공사비 증·감 현황

- 총차 3회                                                          (단위 : 원)

구 분	단위	당 초	변 경	증 ·감
****	*	*************	*************	**	***********
*****	*	*************	***********	**	**********
*****	*	***************	*************	**	***********

- 2차 2회                                                            (단위 : 원)

구 분	단위	당 초	변 경	증 ·감
****	*	*************	*************	**	***********
*****	*	***********	***********	**	**********
*****	*	*************	*************	**	***********

□ 조치계획

ㅇ 설계변경 관련 규정 및 자문의견 사항을 반영하여 설계변경 시행

- 설계변경 시행 및 변경계약 요청(치수과→총무과)

ㅇ 설계변경 승인 통보(치수과→건설사업관리단)

붙임 : 1. 변경 내역서 1부

2. 계약금액조정 검증확인서 각 1부

3. 설계변경 자문 심의결과 1부

4. 건설사업관리단 검토의견서 1부

5. 관련 보고서 각 1부.  끝.