문서번호	공원여가과-2245
결재일자	2024. 6. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
여가사업팀장		공원여가과장	서부공원여가센터소장
김정미		代김주연	06/24
			신현호
협조	공원운영과장		강종희
	재무팀장		전선훈

『노을공원 캠핑장 재조성공사 실시설계용역』

기간연장검토 보고

2024. 6. 24.

서부공원여가센터

(공원여가과)

『노을공원 캠핑장 재조성공사 실시설계 용역』

기간연장 검토 보고

노을공원 캠핑장 재조성(D구역)공사 실시설계 용역 기간을 연장코자 아래와 같이 보고드림.

□ 관련근거

ㅇ「용역계약 일반조건」제19조(계약기간의 연장)

ㅇ 노을공원 캠핑장 재조성공사 추진계획(공원여가과-817, 2024.2.28.)

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 노을공원 캠핑장( D구역) 재조성공사 실시설계용역

ㅇ 용역기간 : `2024. 4. 3. ~ 7. 1.

ㅇ 용 역 비 : ************

ㅇ 용 역 사 : ******************

ㅇ 용역내용

********************************************

****************************************************************

□ 검토내용

*******************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************************************************************

*******************************

ㅇ ************************************

**************************************************************

□ 용역기간 연장 검토

ㅇ 용역기간 연장

- 당    초 : 2024. 4. 3. ~ 7. 1.

- 변    경 : 2024. 4. 3.　~ 9. 29.(90일 연장)

ㅇ 연장사유 : ***********************

ㅇ 지체배상금 : 미부과(귀책소재 : 서부공원여가센터)

※「지방계약법」시행령 제90호제1항 계약상대자의 책임없는 사유로 인한 계약이행 지체

□ 향후계획

ㅇ 2024. 6. ~  7.  : 설계준공기간 연장의뢰 및 변경계ㅇ약(→공원운영과)

ㅇ 2024.  9. ~ 10. : 용역 준공 및 공사 발주

ㅇ 2024. 11. ~ 12. : 노을캠핑장 재정비 공사 시행.  끝.