문서번호	급수운영과-11565
결재일자	2024. 6. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김동하		代김기문	06/26
			채재일
협조

「2023년 서대문구 관내 상수도공사」

설계변경(3차, 최종) 시행 및 심의회 개최 계획보고

2024. 6.

서부수도사업소

(급수운영과)

「2023년 서대문 관내 상수도공사」

설계변경(3차, 최종) 시행 및 심의회 개최 계획보고

우리사업소에서 시행중인 「2023년 서대문구 관내 상수도공사」와 관련하여 설계변경(3차, 최종) 시행 전 해당 서류를 검토하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		관련근거

□ 『(계약예규)공사계약 일반조건』 제20조 제1항

ㅇ 【설계변경으로 인한 계약금액의 조정】

□ 『공사계약 일반조건』 제20조 제2항

ㅇ 【공사설계의 변경】

□ 장기계속 단가계약공사 발주계획(2023년 서대문구 관내 상수도공사)

Ⅱ		공사현황

ㅇ 공 사 명: 2023년 서대문구 관내 상수도공사(연간단가계약)

ㅇ 계약기간: 2023. 7. 3. ~ 2024. 6. 30.

ㅇ 공사개요: D=13~300mm, L=2,458m

ㅇ 계약금액: ***************

ㅇ 계약상대자: ***************

Ⅲ		설계변경(3차, 최종) 현황

□ 설계변경 금액 내역

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
*****		*************	*************	**********
***	**********	***********	***********	*
	**********	***********	***********	**********
	**	*************	*************	**********
*****		***********	***********	*
**********		***********	***********	*

□ 설계변경 사유

ㅇ 공사 시행에 따른 물량 증감 및 신규 공종 발생

- 신규 공종: 아스팔트 포장절단 등 87개 공종

- 물량 증감: 아스팔트 파쇄물운반 등 430개 공종

Ⅳ		심의개요

ㅇ 심의위원 구성

- 위원장: 급수운영과장 채재일

- 위  원: 급수운영과 시설6급 신정우, 이기명

시설관리과 시설6급 신동철, 김용섭

- 간  사: 급수운영과 시설6급 김기문

ㅇ 심의회 개최

- 일  시: 2024. 6. 26.(수) 09:30

- 장  소: 전자결재 서면 심의

- 안  건: 「2023년 서대문구 관내 상수도공사」 설계변경(3차, 최종)에    대한 적정 여부 심의

ㅇ 심의 검토사항

- 신규공종 적정 여부

- 공종별 수량 산출 적정 여부

- 기타 관련사항 적정 여부 등

Ⅴ		향후계획

ㅇ 상기와 같이 「2023년 서대문구 관내 상수도공사」의 설계변경 심의회를 개최코자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 검증확인서 1부.

3. 설계변경 심의설명서 및 사전심의의결서 1부.  끝.