문서번호	급수운영과-11594
결재일자	2024. 6. 26.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	서부수도사업소장
김동하	代김기문	채재일	06/26
			代김종은
협 조

『2023년 서대문구 관내 상수도공사』

설계변경(3차, 최종)심의회 결과 보고

2024. 6.

서부수도사업소

(급수운영과)

『2023년 서대문구 관내 상수도공사』

설계변경(3차, 최종)심의회 결과 보고

「2023년 서대문구 관내 상수도공사」의 설계변경(3차, 최종) 심의회 결과보고임.

Ⅰ		공사 및 설계변경 현황

❍ 공사현황

- 공 사 명: 2023년 서대문구 관내 상수도공사

- 계약기간: 2023. 07. 03.~2024. 06. 30.

- 도 급 비: **************

- 공사개요: ********************

- 시 공 사: (주)운악건설 대표 ***

- 공사감리: (주)천일 건설사업관리기술자 ***

❍ 설계변경 현황

- 기성기간: ***************************

- 공사개요(2차수)

• 당초: ******************

• 변경: ******************

- 변경사유: 신규공종 및 시공에 따른 물량 증·감 발생

- 설계변경 금액

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증·감
총 공사비		*************	*************	**********
도급비	1차수(2023년)	***********	***********	*
	2차수(2024년)	***********	***********	**********
	총 차	*************	*************	**********
관급자재비		***********	***********	*
도로복구비 및 기타		***********	***********	*

Ⅱ		심의개요

❍ 심의 개요

❍ 심의위원 구성

- 위원장: 급수운영과장 ***

- 위  원: 급수운영과 *************

시설관리과 *************

- 간  사: 급수운영과 ********

❍ 심의회 개최

- 일  시: 2024. 6. 26.(수) 09:30

- 장  소: 전자결재 서면 심의

- 안  건: 「2023년 서대문구 관내 상수도공사」 설계변경(3차, 최종)에 대한 적정 여부 심의

❍ 심의 검토사항

- 신규공종 적정성 여부

- 공종별 수량 산출 적정성 여부

- 기타 관련사항 적정성 여부 등

❍ 심의 의견: ***

Ⅲ		향후계획 및 행정사항

❍ 상기와 같이 「2023년 서대문구 관내 상수도공사」의 설계변경 심의회를 개최한 결과 적정하여 계약상대자와 합의 후 설계변경(3차, 최종)를 시행코자 함.

❍ 설계변경(3차, 최종) 계약 의뢰 - 행정지원과

붙임  1. 설계변경 심의의결서 1부.

2. 설계변경 심의설명서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 검증확인서 1부.  끝.